공약연번	목영대교(대불산단대교가칭) 건설 추진		담당부서
119
			건설과

	최종목표
광주~영암 아우토반 효과를 서남권 경제․관광 활성화를 위한 마중물로 활용하기 위해 목포 삼학도~영암 대불산단을 잇는 목영대교(대불산단대교)를 도개교로 연결하고자 추진 ▸대불국가산단, 용당일반산단 입주기업 생산활동 지원 및 물류비 절감

사업성격	신 규 ○ 계 속 ●	추진주체	국 가 ● 지자체 ○	완료시기	임기내 ○ 임기후 ●
예산여부	예 산 ● 비예산 ○	추 진 율	5 %	총사업비	190,000백만원
추진상황	완료 ○ 완료후계속추진 ○ 정상추진 ● 일부추진 ○ 보류 ○ 폐기 ○

☐ 사업개요

○ 사업기간 : 2023 ~ 2035

○ 위    치 : 목포 남항 ~ 영암 대불

○ 사 업 량 : L=2.5㎞(교량 2㎞ / 접속부도로 0.5㎞), B=15m(편도 1차로)

○ 사업내용 : 목포 ~ 영암을 잇는“도개교”형식으로 조성하여 교통환경 개선 및 관광자원 활용(교량 2㎞, 주탑높이 189.7m)

○ 사 업 비 : 총 190,000백만원(국비 185,000, 시비 5,000)

▸ 전남도에서 추진중인 전남 서남권 SOC 新프로젝트 사업 中 ‘광주~영암 아우토반’ 사업과 연계 추진 되는 사업으로 사업내용 변경 가능

☐ 추진현황

○ ‘22. 2. : 광주~영암 아우토반 제20대 대선 지역공약 반영

○ ‘22. 8. ~ ‘23. 3. : 지방도 반영․용당일반 산단진입도로 건의 사전 협의시↔도

○ ‘23. 5. 31. : 전남 서남권 SOC 新 프로젝트 발표전라남도․목포시․무안군․영암군

▸광주~영암․목포 아우토반, 목영대교(대불산단대교) 연결

○ ‘23. 7. 20. : 목영대교건설 사전예비타당성조사 용역 착수49백만원(市‘23년예산)

○ ‘23. 7. 26. : 아우토반 건설 건설공사 사전조사용역 착수150백만원(道‘23년예산)

○ ‘23. 9. 26. : 道 대불산단대교 건설 사전조사용역 착수보고전남도․목포․무안․영암

	아우토반 사업개요【2025~2035 】
• 위 치 : 광주 승촌IC~서영암IC~F1경기장~대불산단~목포 남동항 • 규 모 : 65.8㎞, 2조 7,900억 원 ① 아우토반(광주~영암) : L=47.0㎞, 2조 6,000억 원(국가계획 반영) ② 국도․국지도 이용 : L=16.3㎞, (기존노선 활용) ③ 대불산단대교(영암~목포) : L= 2.5㎞, 1,900억 원(산단 지원계획 반영)

☐ 연차별 공약이행 지표

연도별	추진계획	추진실적	누적 진도율
2022	전남도 사전협의	사전협의 및 지원건의	5%
2023	사전예비타당성 용역추진 및 산단진입도로 수요조사 제출	사전예비타당성 용역 추진중	5%
2024	타당성 평가 및 산단진입도로 대상확정	-	10%
2025	예비타당성 통과 및 기재부 예산반영	-	10%
2026	기본 및 실시설계용역 추진	-	20%

☐ 연차별 예산운영

(단위 : 백만원)

구 분	총 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
예산액	190,000	-	49	-	-	189,951
확보액	49	-	49	-	-	-
집행액	-	-	-	-	-	-

☐ 향후계획

○ 대선 공약 사항인 광주~영암․목포간 아우토반 건설을 목영대교(대불산단대교)와 연계하여 국가사업으로 시행

○ ‘23. 10. ~ ‘25. : 「산단 지원계획」 반영

▸산단진입도로 수요조사(‘23.10.)→타당성평가(‘24.4.~8.)→대상확정(‘24.9.)→예타(‘25.)

※목차

담당부서		건설과장 김재진 도로시설팀장 정재홍 주무관 정성훈(☎3484)