11

주요 투자사업 추진현황(신규)

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 우리시에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
목포시 장사시설 건립	32,976	3,201	21,045	8,730	2014년	2009년	부지조성 60%
갓바위~국립해양 유물전시장간 해상보행교 설치	3,100	-	20	3,080	2015년	2012년	5%
오성식품 도축장 이전사업	4,188	1,000	1,600	1,588	2014년	2011년	30%
찾아가고싶은섬 가꾸기사업	2,586	201	1,049	1,336	2015년	2011년	25%
율도 어촌소득기반 사업	2,600	364	886	1,350	2015년	2011년	24%
서남방송국~본옥동간 도로개설	12,674	7,370	2,300	3,004	2014년	2010년	78%
산정동 가톨릭성지 진입도로개설	3,489	50	2,300	1,139	2015년	2010년	보상중
서남권수산물유통센터 진입도로 확장공사	4000	2,125	875	1,000	2014년	2011년	75%
상동초기우수처리 시설 설치사업	15,609	5,836	1,909	7,864	2015년	2009년	37%
북항공공하수처리 고도처리설치사업	7,944	330	4,199	3,415	2014년	2010년	4%
대양이로하수처리분구 연계처리시설	9,681	839	3,776	5,066	2015년	2010년	10%

‣ (대상사업) 2012년까지 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 ‘13.6말 현재 추진 중에 있는 사업 중 2012년 또는 2013년 예산에 반영된 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

목포시 장사시설 건립

담당자

노인장애인과

윤주명(☎270-8862)

□ 필요성 및 기대효과

○ 재래식 화장장 이전 숙원사업 해결과 장례문화 확산에 대처하고자

민․관 공동으로 장사시설을 건립하여 One-Stop 장례서비스 제공

□ 사업개요

○ 기간 : ‘10. 5 ~ ’14. 6

○ 위치 : 목포시 대양동 764-11번지 일원

○ 시공사 : 부지조성 재)하늘나루

○ 사업규모 : 총 연면적 13,785㎡ (목포시 4,118㎡ . 민간 9,666㎡)

• 목포시 : 화장장, 봉안당, LPG저장소 / 민간 : 장례식장, 봉안당

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,976백만원(국비5,721 도비642 시비6,613 민자 20,000)

○ 지금까지 집행액 : 3,201백만원(목포시 701 / 민자 2,500)

•  목포시 ‘09.~’13. 시비 701백만원  민자 ‘12.~’13. 2,500백만원

○ 향후 소요액 : 29,775백만원

시행자	연도별	재 원 별 (백만원)				비 고
		국 비	도 비	시 비	민 자
목포시	2013	5,721	642	2,182
	2014			3,730
민 간	2013				12,500
	2014				5,000

□ 추진상황

○ 부지조성 토목공사 60% (민간 시행)

○ 도시계획사업 실시계획인가 (토목변경, 건축공사) : ‘13. 8

□ 향후계획

○ 건축공사 착공 : ‘13. 9

○ 장사시설 건립사업 준공 : ‘14. 6

□ 사업변경 내역                                    (단위 : 백만원)

구 분	사업량	총사업비	사업기간	비 고
당 초	부지 50천㎡ 연면적 13,715㎡	29,400	‘10 ~ ’11
현 재	부지 61천㎡ 연면적 13,785㎡	32,976	‘10 ~ ’14	민간자본 증

사업명	갓바위~국립해양유물전시장간 해상보행교 설치공사	담당자	관광과 박재홍 (☎270-8216)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 갓바위 문화의거리와 평화광장의 연결을 통한 해변도시 특성화 ○ 갓바위권 관광상품화로 관광자원화 및 지역경제 활성화에 기여 □ 사업개요 ○ 기간 : ‘14~’15 ○ 위치 : 갓바위보행교 입구 ~ 국립해양유물전시관 ○ 시공사 : 미발주 ○ 사업규모 : L=585m, L=2~3m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,100백만원(국비 1,550, 시군구비 1,550) ○ 지금까지 집행액 : 없음 ○ 향후 소요액 : 3,100백만원 - 2013년 : 20백만원(시비) - 2014년 : 1,500백만원(국비770, 시비730) - 2015년 : 1,580백만원(국비790, 시비790) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ ‘08.10 : 지방재정 투융자심사(적정) ○ ‘09. 8 : 실시설계완료 ○ ‘12. 6 : 계약심사(전라남도) □ 향후계획 ○ ‘14년 ~ ’15년 : 공사착공 및 준공

사업명	오성식품 도축장 이전사업	담당자	농상과 김대승(☎270-8572)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 악취와 소음 등으로 주거환경을 저해하는 목포도축장을 기한 내에 조기 이전 완료될 수 있도록 행정지원 및 원활한 사업추진 도모 ○ 주변 환경정비로 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성 □ 사업개요 ○ 기간 : 2012. 1 ~ 2014. 12(3년간) ○ 위치 : 목포시 석현동 714번지 일대 ○ 시공사 : (주)오성식품 도축장 ○ 사업규모 : 부지 7,542.05㎡, 건물 2,583.6㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,188백만원(시비 4,188) ○ 지금까지 집행액 : 1,800백만원(‘12년 1,000, ‘13년 800, 전액 시비) ○ 향후 소요액 : 2,388백만원(‘13년 800, ‘14년 1,588, 전액 시비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%) ○ 도축장 이전부지 도시관리계획 변경 의뢰 : ’13. 1월 ○ 1차 보상금(10억원) 지급 : ’12. 5월 ○ 2차 보상금(8억원) 지급 : ’13. 3월 □ 향후계획 ○ 3차 보상금(8억원) 지급 예정 : ’13. 12월 ○ 신축 도축장 공사 준공 : ’14. 10월 ○ 4차 보상금(15억원) 지급 : ’14. 12월 □ 사업변경 내역 ○ 해당사항 없음

사업명

찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업

담당자

해양수산과 정봉채

(☎061-270-8328)

□ 필요성 및 기대효과

○ 지역의 개발잠재력, 보유자원을 활용한 기초 기반시설을 바탕으로

창의적인 사업을 개발하여 체험시설, 레저교육 시설등을 추가하여

4계절 복합관광지 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2012~2015       ○ 위치 : 외달도

○ 시공사 : (주) 대흥건설

○ 사업규모 : 다목적 수련관 건립, 어구보수 및 보관시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,586백만원 (국비 2,000, 시도비 250, 시군구비 250, 기타 86)

○ 지금까지 집행액 : 697백만원

(단위:백만원)

재원 연도	합계	2012까지	2013	비고
합계	697	201	496
국비 도비 시비 기타	558 69 70	166 17 18	392 52 52

○ 향후 소요액 : 1,889백만원

(단위:백만원)

재원 연도	합계	2013	2014이후	비고
합계	1,889	553	1,336
국비 도비 시비 기타	1,442 181 180 86	442 56 55	1,000 125 125 86

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2013. 7 : 어구보수 보관시설 확충

□ 향후계획

○ 2013. 9 : 다목적 수련관 건립 용역 추진

○ 2013. 12 : 다목적 수련관 조성공사 추진

사업명

율도 어촌소득기반 사업

담당자

해양수산과 정봉채

(☎061-270-8328)

□ 필요성 및 기대효과

○ 지역 특산품의 부가가치 제고를 위한 시설 확충이 필요하며, 기존 패류

양식장을 활용한 체험 어장 개발

□ 사업개요

○ 기간 : 2012~2015       ○ 위치 : 율도

○ 시공사 : 비봉건설 주식회사

○ 사업규모 : 해안도로개설, 선착장등 보강외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원(국비 2,000, 시도비 250, 시군구비 250, 기타 100)

○ 지금까지 집행액 : 577백만원

(단위:백만원)

재원 연도	합계	2012까지	2013	비고
합계	577	364	213
국비 도비 시비 기타	460 54 63	287 39 38	173 15 25

○ 향후 소요액 : 2,023백만원

(단위:백만원)

재원 연도	합계	2013	2014이후	비고
합계	2,023	673	1,350
국비 도비 시비 기타	1,540 196 187 100	540 71 62	1,000 125 125 100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ 2013. 8 : 율도 1,2구 선착장 등 보강시설 확충

□ 향후계획

○ 2013. 8 : 율도 떡바위~고분도간 도로개설 추진

사업명	서남방송국~본옥동간 도로개설	담당자	건설방재과 이충완(☎061-270-3484)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 도시계획도로 확장으로 교통소통 원활 및 지역균형 발전도모 □ 사업개요 ○ 기 간 : ‘07. 2. 22~’14.12.31 ○ 위치 : 산정동 종원나이스빌 주변 ○ 시공사 : 경도건설(주) ○ 사업규모 : 도로개설 L=370m, B=20m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 12,674백만원(시군구비 12,674) ○ 지금까지 집행액 : 9,670백만원(‘12년까지 7,370/’13년 2,300) ○ 향후 소요액 : 3,004백만원(‘14년 3,004) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%) ○ ‘05. 09. 13 : 투․융자심사 ○ ‘06. 02. 27 : 실시설계완료 ○ ‘07. 01. 05 : 실시계획 인가고시 ○ ‘07. 02. 22 ~’13. 02. 15: 1~8차분 공사완료 ○ ‘13. 03. : 9차분 공사 착수 □ 향후계획 ○ ‘13. 12. 30 : 옹벽, 육교, 상수도, 배수공 완료 ○ ‘14. 12. 30 : 포장공, 법면보호공, 부대공, 가로등 완료

사업명	가톨릭성지 진입도로개설공사	담당자	건설방재과 이충완(☎061-270-3484)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 산정동 가톨릭성지화 사업의 진입도로로 교통소통 원활 및 지역균형 발전 도모 □ 사업개요 ○ 기 간 : ‘07.3.31~’15.12.31 ○ 위 치 : 산정동 등대식육식당 주변 ○ 사업규모 : 도로개설 L=230m, B=12m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,489백만원(시군구비 3,489) ○ 지금까지 집행액 : 2,350백만원(‘12년까지 50/’13년 2,300) ○ 향후 소요액 : 1,139백만원(‘14년 1,139) □ 추진상황 ○ ‘05. 09. 07 : 실시설계 완료 ○ ‘07. 03. 20 : 실시계획인가 고시 ○ ‘13. 02. 27 : 산정동 가톨릭성지 진입도로개설 실시계획(변경)인가 고시 ○ ‘13. 08 현재 : 토지 및 지장물 보상중 □ 향후계획 ○ ‘14. 3 ~ ’15. 12. 31 : 도로개설 완료

사업명	서남권수산물유통센터 진입도로 확장공사	담당자	원도심사업과 이인정(☎061-270-3649)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 서남권 수산물 유통센터 접근성 향상 및 지역경제 활성화를 도모하고 이용객 편의를 위해 진입도로 확장 추진 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011년 3월 ~ 2014년 12월 ○ 위치 : 수산물 유통센터 ~ 남초등학교 사거리 ○ 시공사 : ○ 사업규모 : L=140m, B=20m(기존 8m ~ 10m 확장) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,000백만원(시도비 80, 시군구비 3,920) ○ 지금까지 집행액 : 3,000백만원(시도비 80, 시군구비2,920) ○ 향후 소요액 : 1,000백만원(시군구비 1,000) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%) ○ ‘11. 3. 18. : 실시계획 인가 고시 (목포시 2011-11호) ○ ‘12. 3. 9. : 1구간 보상 및 철거 완료(토지 9, 건물 8) ○ ‘12. 5. 24 : 1구간 가포장(L=60m) 완료 → 도로 폭20m 확보 ○ ‘12. 7. 17 : 2구간(대양장모텔앞) 보상 및 철거 완료 (토지3,건물3) ○ ‘13. 9. : 2구간 (남초교 사거리 초입부 - 토지4, 건물2)보상 및 철거 완료 ○ ‘13. 10. : 2구간 (고지대 노후건물 - 토지4, 건물4)보상 및 철거 완료 ○ ‘13. 12. : 남초교 사거리 초입부 L=40m 도로개설 □ 향후계획 ○ ‘14. 1. ~ 6. : 2구간 잔여지(토지2, 건물6) 보상 및 철거 완료 ○ ‘14. 6. ~ 12. : 잔여구간(암반노출구간)진입도로 확장공사 추진(L=80m)

사업명	상동초기우수처리시설 설치사업	담당자	하수과 강혜선(☎061-270-8627)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 오염부하량이 높은 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스터미널 앞 저지대 상습침수 문제의 근원적 해결 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2010~2015 ○ 위 치 : 목포시 상동버스터미널 앞 ○ 시공사 : 대륙건설(주) ○ 사업규모 : 초기우수 저류조 V=10,000㎥ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 15,609백만원(국비 10,926, 시군구비 4,683) ○ 지금까지 집행액 : 5,836백만원(‘11년까지 473 - 국비 368, 시비 105, ‘12년 5,363 - 국비 5,163, 시비 200) ○ 향후 소요액 : 9,773백만원(‘13년 1,909 - 국비 930, 시비 979 ‘14년이후 7,864 - 국비 4,465, 시비 3,399) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%) ○ ‘13. 1. : 영산강유역환경청 재원협의 등 행정절차 이행 ○ ‘13. 4. : 공사착공 ○ ‘13. 6. : 장마철대비 가배수로 확보, 기존오수관 철거 및 이설 □ 향후계획 ○ ‘13. 9. : 저류조 설치 가시설 및 토공 ○ ‘13. 10. : 저류조 바닥 콘크리트 타설 및 저류조 설치 ○ ‘15. 5. : 공사준공 □ 사업변경 내역 ○ 해당사항 없음

사업명	북항공공하수처리 고도처리설치사업	담당자	하수과 강혜선(☎061-270-8627)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 공공하수처리서설의 법적방류수 수질기준 강화에 따라 고도처리 설치로 안정적 하수처리장 운영 및 공공수역 수질오염 예방 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012~2014 ○ 위 치 : 목포시 북항하수처리장 내 ○ 시공사 : ○ 사업규모 : 고도처리 Q=35,000㎥/일 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 7,944백만원(국비 3,972, 도비 402, 시비 3,570) ○ 지금까지 집행액 : 330백만원(‘12년 330 - 국비 155, 도비 20, 시비 155) ○ 향후 소요액 : 7,614백만원(‘13년 4,199 - 국비 3,817, 도비 382 ‘14년이후 3,415 - 시비 3,415) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%) ○ ‘10. 5. : 지방재정 투ㆍ융자 심사(전라남도-조건부) ○ ‘12. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ ‘13. 5. : 고도처리를 위한 공법선정 1차평가 완료 □ 향후계획 ○ ‘13. 9. : 고도처리 공법선정 완료 및 용역 중간보고 ○ ‘13. 11. : 행정절차 이행 및 공사착공 ○ ‘14. 12. : 공사준공 □ 사업변경 내역 ○ 해당사항 없음

사업명	대양이로하수처리분구 연계처리시설	담당자	하수과 강혜선(☎061-270-8627)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 하수 미처리구역인 대양ㆍ이로하수처리분구의 하수를 이로중계펌프장까지 이송 북항하수처리장에서 처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시생활환경 조성 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2010~2015 ○ 위 치 : 목포시 대양동 국도1호선 대체우회도로 일원 ○ 시공사 : 한호건설(주) ○ 사업규모 : 중계펌프장 2개소, 압송관 5.6km □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 9,681백만원(국비 4,841, 시비 4,840) ○ 지금까지 집행액 : 839백만원(‘11년 까지 455 - 국비 424, 시비 31 ‘12년 384 - 국비 340, 시비 44) ○ 향후 소요액 : 8,842백만원(‘13년 3,776 - 국비 3,436, 시비 340 ‘14년이후 5,066 - 국비 641, 시비 4,425) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ○ ‘10. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ ‘13. 3. : 공사착공 ○ ‘13. 7. : 압송관 부설 5.59km 중 0.8km 완료 □ 향후계획 ○ ‘13. 10. : 이로중계펌프장 건설 ○ ‘14. 12. : 대양 중계펌프장 건설 및 압송관로 부설 2.79km ○ ‘15. 2. : 공사준공 □ 사업변경 내역 ○ 해당사항 없음

11-2. 지방채 발행사업

우리 목포시에서 현재 추진 중인 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 작성기준 : 2013. 6월말 현재 추진 중인 사업(2013년 예산에 반영된 사업)

▸ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

▸ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

11-3. 민간투자사업

우리 목포시에서 현재 추진 중인 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				‘12년까지 부담액	‘13년 부담 예정액	‘14년 이후 부담 예정액
BTL	‘05년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	푸른목포환경(주)	50,294	15,618	5,749	94,776	20년
	‘06년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	맑은목포환경(주)	65,935	6,969	7,406	135,927	20년

▸ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2012년까지는 집행액(결산기준), 2013년은 예산 반영액, 2014년 이후는 추정액

▸ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

☞ 재정부담액이 큰 사업 위주로 재정부담이 큰 사유를 설명

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

- 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

‣ 작성요령은 투융자심사사업에 준하며, 총사업비, 최소수익보장 등 계약조건, 지금까지 임대료 및 운영비 부담액, 향후 부담예정액, 계약조건변경 사항 등을 필히 기재

개별 민간투자사업 현황

사업명

‘05년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수과

김장원(☎061-270-3537)

□ 필요성 및 기대효과

○ 필요성

남해처리구역을 민간투자방식(BTL)사업으로 하수관거정비하여

침수피해 방지와 하수처리효율제고 및 쾌적한 도시환경조성.

○ 기대효과

∙ 관거내 침입수/유입수(I/I)량 저감에 따른 하수종말처리시설의 운영효율 향상

∙ 유지관리시스템 구축에 의한 관거기능 최적화

∙ 우수저류조 설치로 침수피해 개선에 의한 도시기능 활성화

∙ 수질개선에 의한 공중보건위생 향상 및 친환경적 도시환경 조성

∙ 방류수역의 수질개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2006.6.12. ~ 2010.4.11.(46개월)

○ 운영기간 : 2010.4.12. ~ 2030.4.11.(20년간)

○ 위치 : 목포시 용당동, 연동, 산정동, 목원동, 동명동, 삼학동 일원

○ 민간사업자 : 푸른목포환경(주)

○ 총사업비 : 50,294백만원

○ 사업규모 : 하수관거 63.3km, 배수설비 3,204개소, 배수펌프장 1식

유지관리 모니터링시스템 1식.

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

-임대료 : 116,143백만원

-기간 : 2010.4.12. ~ 2030.4.11.(20년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료) : 15,618백만원

구 분	시설임대료 및 운영비	비고
2010년	4,140
2011년	5,735
2012년	5,743
소 계	15,618

○ 2013년 부담예정액 : 5,749백만원

구 분	시설임대료 및 운영비	비고
2013년	5,749

○ 2014년 이후 부담예정액 : 94,776백만원

구 분	시설임대료 및 운영비	비고
2014년 이후	94,776

□ 추진단계

○ 운영중[운영기간: 2010.4.12. ~ 2030.4.11.(20년간)]

□ 향후계획

○ 20년간 푸른목포환경(주)에서 유지관리

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	하수관거 67.43km 배수설비 3,266개소 배수펌프장 1식 유지관리 모니터링시스템 1식	하수관거 63.3km 배수설비 3,204개소 배수펌프장 1식 유지관리 모니터링시스템 1식	공사비 변동없음
총사업비	52,291백만원	50,294백만원	감1,997백만원

사업명

‘06년 목포시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수과

김장원(☎061-270-3537)

□ 필요성 및 기대효과

○ 필요성

남해,북항처리구역을 민간투자방식(BTL)사업으로 하수관거정비하여

침수피해 방지와 하수처리효율제고 및 쾌적한 도시환경조성.

○ 기대효과

∙ 관거내 침입수/유입수(I/I)량 저감에 따른 하수종말처리시설의 운영효율 향상

∙ 유지관리시스템 구축에 의한 관거기능 최적화

∙ 우수저류조 설치로 침수피해 개선에 의한 도시기능 활성화

∙ 수질개선에 의한 공중보건위생 향상 및 친환경적 도시환경 조성

∙ 방류수역의 수질개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2008.8.22. ~ 2012.1.21.(시운전 4개월 포함)

○ 운영기간 : 2012.1.22. ~ 2032.1.21.(20년간)

○ 위치 : 목포시 남해A, 하당1, 내항, 북항처리분구 일원

○ 민간사업자 : 맑은목포환경(주)

○ 총사업비 : 65,935백만원

○ 사업규모 : 하수관거 49.82km, 배수설비 705개소, 저류조 1개소

유지관리 모니터링시스템 1식.

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

-임대료 : 150,302백만원

-기간 : 2012.1.22. ~ 2032.1.21.(20년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료) : 6,969백만원

구 분	시설임대료 및 운영비	비고
2012년	6,969

○ 2013년 부담예정액 : 7,406백만원

구 분	시설임대료 및 운영비	비고
2013년	7,406

○ 2014년 이후 부담예정액 : 135,927백만원

구 분	시설임대료 및 운영비	비고
2014년 이후	135,927

□ 추진단계

○ 운영중[운영기간: 2012.1.22. ~ 2032.1.21.(20년간)]

□ 향후계획

○ 20년간 맑은목포환경(주)에서 유지관리

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	하수관거 50.34km 배수설비 651가구 우수저류조 2개소 유지관리 모니터링시스템 1식	하수관거 49.82km 배수설비 705개소 우수저류조 1개소 유지관리 모니터링시스템 1식
총사업비	66,089백만원	65,935백만원	감155백만원