109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 목포시에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	총 사업비	2016년 까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재 까지 진척률 (%)
계
보훈회관 건립공사	1,692	47	1,591	54	2018	2015	100
노인회관/노인복지관 건립공사	3,906	76	3,634	120	2018	2015	100
목포시하당청소년문화의집 건립	2,464	-	750	1,714	2018	2016	40
서남권 친환경수산종합지원단지	35,612	14,940	7,080	13,592	2019	2014	30
국립호남권생물자원관 건립	47,400	5,500	10,600	31,300	2019	2017	15
목포권 광역위생매립장 순환이용 정비	40,820	-	669	40,151	2021	2016	20
가톨릭성지 주변 도로개설	4,900	2	251	3,647	2020	2017	15
목포야구장건립	4,566	781	3,043	743	2018	2015	100
제7회 국제파워보트대회 개최	223	251	263	223	2017	2017	100
용해2지구∼백련펌프장 하수관거정비사업	18,550	3,297	1,598	11,397	2020	2011	45
상동초기우수처리시설 설치사업	15,069	12,401	700	2,508	2018	2014	90
하수도정비 중점관리지역 정비사업	35,016	17,930	6,803	10,283	2020	2014	60
남악신도시 하수처리시설 증설사업	29,656	10,463	8,786	10,407	2018	2013	90
서산,온금 지구 재정비 촉진지구 기반시설조성	316,000	3,568	5,605	306,827	2020	2015	20

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

목포시 보훈회관 건립공사

담당자

사회복지과 박미정

(☎ 270-8885)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 보훈회관을 건립하여 보훈단체의 새로운 보금자리 마련 및 보훈

대상자들의 복지증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.1.19. ~ 2018.1.25.

○ 위 치 : 목포시 호남로 67번길 7

○ 규 모 : 4층, 철근콘크리트구조, 연면적 799㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,692백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,692	47	47	1,591	54
국 비	500			500
시 도 비
시군구비	1,192	47	47	1,091	54
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도시관리계획 결정변경 용역 완료 : ‘15. 7. 4.

○ 목포시 지방재정투융자 심사(적정) : ‘15. 6. 15.

○ 기본 및 실시설계 용역 발주 : ‘15. 11. 17.

○ 목포시 건설기술 심의 : ‘16. 11. 11.

○ 공사 계약 : ‘17. 1. 13.

○ 공사 착공 : ‘17. 1. 19.

○ 공사 준공 : ‘18. 1. 25.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

노인회관/노인복지관 건립공사

담당자

노인장애인과 정인선

(☎270-8870)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후되고 협소한 노인회관/노인복지관을 신축 이전하여 원도심 지역

노인들에게 다양한 복지서비스를 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.1.19. ~ 2018.1.25.

○ 위 치 : 목포시 호남동 9-3 외 4필지

○ 규 모 : 지하1층/4층, 철근콘크리트구조, 연면적 2,141.19㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,906백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,906	76	76	3,634	120
국 비	300	76	76	148
시 도 비	100			100
시군구비	3,506			3,386	120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도시관리계획 결정변경 용역 완료 : ‘15. 7. 4.

○ 목포시 지방재정투융자 심사(적정) : ‘15. 6. 15.

○ 기본 및 실시설계 용역 발주 : ‘15. 11. 17.

○ 목포시 건설기술 심의 : ‘16. 11. 11.

○ 공사 계약 : ‘17. 1. 13.

○ 공사 착공 : ‘17. 1. 19.

○ 공사 준공 : ‘18. 1. 25.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

목포시하당청소년문화의집 건립

담당자

여성가족과

오남균(☎270-8137)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신도심지역의 청소년 문화공간 조성 및 건전한 활동 공간을 확보하여 다       양한 청소년 참여 프로그램 등을 제공함으로써 청소년육성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 목포시 옥암동 1021

○ 규 모 : 연면적 1,260.27㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,464			750	1,714
국 비	1,971			600	1,371
시 도 비
시군구비	493			150	343
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(공정율 : 40%)

○ 옥탑 슬라브 거푸집 작업

○ 실내 전기설비 작업

□ 향후계획

○ 2018. 12. 준공예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서남권 친환경수산종합지원단지

담당자

수산진흥과

김일섭(☎270-8229)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항기능의 북항 이전으로 수산물의 생산‧가공‧유통‧물류기능을 종합적으로 지원하는 수산종합지원단지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2019

○ 위 치 : 목포시 죽교동 674-2 외 2필지

○ 규 모 : 부지 101,951㎡, 건축연면적 14,265㎡(4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,612백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	35,612	14,940	7,080	7,847	5,745
국 비	17,806	7,470	3,540	3,922	2,874
시 도 비
시군구비	7,122	2,987	1,416	1,572	1,147
지 방 채
민간자본	10,684	4,483	2,124	2,353	1,724
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ `11. 12 : 기본계획 및 타당성조사 연구용역

○ `16.  3 : 비관리청항만공사 시행허가

○ ‘16. 11 : 건축허가

○ `17.  9 : 착공

□ 향후계획

○ `19.  9 : 준공

○ `19. 10 ~ 11 : 시운전

○ `19. 12 : 본운영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

국립호남권생물자원관 건립

담당자

환경보호과 정창권(☎270-3331)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리나라 생물자원을 체계적으로 수집·보관하고 연구·관리하기 위한 체계 구축의       일환으로 호남권역 및 도서·연안지역 생물자원의 수집, 소장, 연구, 전시,         교육 등 역할을 수행하게 될 기관 설립

○ 생물자원화 연구 수행, 지역주민들에게 생물자원을 향유할 수 있는 교육 기회       등을 제공함으로써 생물자원에 대한 지역 접근격차 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2019

○ 위 치 : 목포시 달동 890번지 일원(고하도)

○ 규 모 : 부지면적 94,116㎡, 건축연면적 10,721㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	47,400	5,500	10,600	9,800	21,500
국 비	41,300	2,500	7,900	9,400	21,500
시 도 비
시군구비	6,100	3,000	2,700	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ ‘18. 2. 착공

□ 향후계획

○ ‘19. 12. 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 당초 474억원(국비 413, 시비 61)→변경 534억원(국비 473, 시비 61) 증액

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과

신성원(☎270-8585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매립장의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립지 확보가 어려우므로 사용        중인 매립장 일부를 굴착 후 재사용함으로써 사용기간 연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년

○ 위 치 : 목포시 대양로 241-41 일원(목포시 위생매립장 내)

○ 규 모 : 폐기물 굴착․선별 600,000㎥, 매립장 조성 50,690㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,820백만원(국비 19,146, 시비 21,674)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	40,820		669	7,934	32,217
국 비	19,146		500	3,729	14,917
시 도 비
시군구비	21,674		169	4,205	17,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 2014. 02. 13. : 타당성조사 및 기본계획 완료

○ 2017. 06. 26. : 기본 및 실시설계 용역 착수 (추진율 : 85%)

□ 향후계획

○ ’17. 06. ~ ’18. 10. : 기본 및 실시설계 용역

○ ’18. 11. ~ ’21. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가톨릭성지 주변 도로개설

담당자

건설과 김선웅(☎270-3484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로로 주간선도로와 연계된 교통망 확보 및 주거 밀집지역 재난재해 방지를 위한 소방도로 개설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020

○ 위 치 : 산정동 74-190번지 일원(중로3-74호선, 소로2-623호선)

○ 규 모 :  도로개설 L=520m, B=8~12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	3,900	2	251	1,172	2,475
지 방 채
민간자본
기 타	1,000		11	989

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2017.  1. : 실시설계용역 완료

○ 2017.  8. : 1구간(중로3-74호선 L=86m, B=12m) 도로개설공사 착공

○ 2017. 12. : 2구간(중로3-74호선 L=74m, B=12m) 도로개설공사 착공

□ 향후계획

○ 2018.  1. : 1구간(중로3-74호선 L=86m, B=12m) 도로개설공사 완료

○ 2018.  8. : 2구간(중로3-74호선 L=74m, B=12m) 도로개설공사 완료

○ 2018.  9. : 3구간(소로2-623호선 L=180m, B=8m) 보상 및 철거 추진

○ 2020. 12. : 도로개설사업 완료

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

목포야구장 건립

담당자

교육체육과 유재희

(☎270-3677)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대양산단 진입도로 개설에 따른 접근성 향상과 축구센터의 스포츠마케팅 확충시너지 효과

○ 야구동호인의 생활야구 활성화 저변확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. 1 ~ 2018. 3. 28

○ 위 치 : 대양동 958번지 일원(목포국제축구센터 옆)

○ 규 모 : 조성면적 12,900㎡(야구장 99m×122m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,566백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,566	781	3,043	743
국 비	400	400
시 도 비
시군구비	4,166	381	3,043	743
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :100%)

○ 2016. 08 : 도시계획시설(야구장)사업 실시계획인가고시

○ 2017. 01 : 공사착공

○ 2018. 03 : 준공 및 운영

□ 향후계획

○ 2019년 : 안전설비 및 경기운영실 보완

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 당초) 3,900백만원 → 변경) 4,566백만원 (증 666백만원)

- 사유 : 토지보상비(증 149백만원)  및 공사비(증 517백만원)

○ 사업기간 : 2017. 12. 15 → 2018. 3. 28

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제7회 국제파워보트대회 개최

담당자

교육체육과 황유정

☎(270-3402)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양스포츠에 대한 범시민은 물론 국민적 관심 제고로 친 해양 문화의 확산       을 도모하고, 해양레저스포츠 저변확대, 인프라 구축으로 우리시 대내외

위상 강화와 해양 스포츠육성․발전 등 기반을 마련하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017. 9. 9. ~9. 10(2일가)

○ 위 치 :  목포시 평화광장 앞 해상

○ 규 모 :  2,000여명(8개국 선수81, 임원 139 시민등 1,780)

※ 8개국 : 한국, 슬로바키아, 스웨덴, 포르투칼, 리투아니아, 라트비아, 핀란드, USA

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 223백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	737		251	263	223
국 비
시 도 비	410		150	150	110
시군구비	320		100	110	110
지 방 채
민간자본
기 타	7		1	3	3

□ 대회결과(추진단계 및 진도 : 100%)

구분	KT1 (T-850) 국제경기	수상오토바이 런어바우트 경기
		국제급	국내급	스파크전
참가	9명 (국외 6, 국내 3)	12명 (국내 12)	8명 (국내 8)	7명 (국내 7)
1위	토마스 썰막 (슬로바키아, 39세)	이대수 (한국, 32세)	이민 (한국, 38세)	양서진 (한국, 18세)
2위	사미 레니카이넨 (핀란드, 33세)	김성민 (한국, 40세)	김병진 (한국, 36세)	성동록 (한국, 35세)
3위	정용진 (한국, 46세)	박찬 (한국, 32세)	이지민 (한국, 35세)	오주호 (한국, 44세)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

용해2지구∼백련펌프장 하수관거정비사업

담당자

하수과 김세휘(☎ 270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해2지구 일원의 배수유역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수       방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2020년

○ 위 치 : 용해2지구 ~ 백련펌프장(압해대교 아래)

○ 규 모 : 하수관거 정비 L=1,384m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	18,550	3,297	1,598	1,279	10,118
국 비	12,985	4,995	1,598	1,279	5,113
시 도 비
시군구비	5,565	560	-	-	5,005
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ ‘16. 10. : 공사 착공(총괄분 및 1차분)

○ '17.  9. : 1차분 공사 준공(L=406m)

○ '18.  4. : 2차분 공사 준공(L=140m)

○ '18.  6. : 3차분 공사 추진중(L=180m)

□ 향후계획

○ '18. 12. : 하수관로 정비 지속 추진(잔여분 L=574m)

○ ‘20. 12. : 총괄 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상동초기우수처리시설 설치사업

담당자

하수과 김세휘(☎ 270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오염부하량이 높은 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스

터미널 앞 저지대 상습침수 문제의 근원적 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2018년

○ 위 치 : 목포시 상동 버스터미널 앞

○ 규 모 : 저류조 V=10,000㎥, 차집시설 1식, 우수 암거개량 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,069백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년
계	15,609	12,401	700	2,508
국 비	10,926	10,926
시 도 비
시군구비	4,683	1,475	700	2,508
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘13.  4. : 기본 및 실시설계용역 완료 및 공사착공

○ ‘16.  1. : 1단계 사업 준공(저류조 설치완료)

○ ‘16.  3. : 2단계 사업 착공(우수암거, 차집시설, 전기실 등)

○ ‘17.  8. : 3차분 사업 착공(기계실 건축)

○ ‘17.  9. : 2차분 사업 준공

○ ‘18.  2. : 3차분 사업 준공 및 4차분 착공

□ 향후계획

○ ‘18.   9. : 체육시설 및 공원 식재공사 추진

○ ‘18.  12. : 총괄분 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

하수도정비 중점관리지역 정비사업

담당자

하수과 김세휘(☎ 270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 침수피해가 발생하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정한 지역에       하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위 치 : 목포시 용당1·2동, 상동 일원

○ 규 모 : 관로정비(입암천) L=1.85㎞, 빗물펌프장 2개소, 제어관리시스템 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	35,016	17,930	6,803	-	10,283
국 비	24,511	17,708	6,803	-
시 도 비
시군구비	10,505	222			10,283
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘14.  5. : 하수도정비 중점관리지역 기본계획 승인(환경부)

○ ‘17.  2. : 공사착공(총괄분 및 1차분)

○ ‘17.  3. : 전기공사 공사착공

○ ‘17.  4. : 2차분 공사착공

○ '17.  6. : 공공하수도 설치 인가

□ 향후계획

○ '18.  9. : 1차분 공사 준공(입암천 정비)

○ '18. 12. : 남해유수지 준설공사 추진

○ '20.  2. : 총괄분 공사 준공

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

남악신도시 하수처리시설 증설사업

담당자

하수과 문현혁(☎270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속 증가에 따라 배출되는 하수량도

증가하고 있어 장래 하수처리시설 증설 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 당초 2013년 ~ 2018년 ⇒ 변경 2013년 ~ 2019년

○ 위 치 : 목포시 옥암동 1376번지(남악신도시 하수처리장 내)

○ 규 모 : 시설용량 10,000㎥/일 증설(기존 12,000㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 당초 26,547백만원 ⇒ 변경 29,656백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	29,656	10,463	8,786	5,249	5,158
국 비
시 도 비
시군구비	12,969	2,311	2,000	3,500	5,158
지 방 채
민간자본
기 타	16,687	8,152	6,786	1,749

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘15. 12. : 공사 착공(총괄분 및 1차분)

○ ‘16.  4. ~ ‘17. 12. : 2차분 공사 추진

○ ‘17.  3. ~ ‘18.  5. : 3차분 공사 추진

○ ‘18.  1. ~  : 4차분 공사 추진

□ 향후계획

○ ‘18.  9. : 유량조정조 개보수, 생물반응조 기계공사

○ ‘18. 12. : 잔여공사 발주

○ ‘19.  6. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 시설개선에 따른 추가사업비 투입 및 추가공정에 따른 사업기간 연장

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서산,온금지구 재정비촉진지구 기반시설조성

담당자

도시재생과 김형중(☎270-3649)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 및 불량주택이 밀집된 서산ㆍ온금지구를 유달산의 풍광과 다도해의 전망이 어우러진 친환경 주거공간으로 조성 및 지역균형발전도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위 치 : 서산ㆍ온금ㆍ금화동 일원

○ 규 모 : 도로4개소 3.3km, 공원 46,362㎡, 녹지 9개소 19,485㎡, 주차장 2,364㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 316,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	316,000	3,600	5,600	2,400	304,400
국 비	19,700	3,000	3,000	1,600	12,100
시 도 비
시군구비	19,700	600	2,600	800	15,700
지 방 채
민간자본	276,600			-	276,600
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘16. 1월 ~ ’17. 9월 : 재정비촉진계획 변경 수립용역 착수 및 전라남도 도시계획위원회 심의 완료

○ ‘17. 10월 ~ 12월 : 지형도면 고시 및 온금근린공원 보상 추진

○ ‘18. 1월 ~ 8월 : 온금근린공원 보상 및 철거공사 추진

□ 향후계획

○ ‘18. 9월 ~ : 온금근린공원 보상 협의

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 목포시에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2017년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

※ 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 목포시에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
	해	당		없	음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비