10

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 목포시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
용해2지구 ~ 백련펌프장 하수관거 정비사업	19,793	12,786	2,807	2,500	1,700	2022년	2011년	73
대양이로 하수처리분구 연계처리시설사업	10,481	9,081	1,200	200	-	2021년	2014년	100
하수도정비 중점관리지역 정비사업	35,016	27,733	1,200	900	5,183	2023년	2014년	98
화물자동차 공영차고지 조성	36,000	23,825	3,175	9,000	-	2021년	2015년	50
유달산 목재문화체험장 조성사업	3,000	-	150	2,850	-	2021년	2015년	100
목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업	33,964	4,684	7,082	7,204	14,994	2022년	2016년	42
대성동 행정복지센터 신축공사	2,500	-	500	2,000	-	2021년	2017년	20
고하도 목화(육지면)단지 조성사업	2,700	1,350	1,350	-	-	2021년	2017년	100
목포 해식애 해안길 조성사업	3,900	-	2,600	1,300	-	2021년	2017년	50
대성동 주민센터 주변 공영주차장 조성	2,200	1,029	1,171	-	-	2020년	2017년	100
용해지구 문화시설 건립사업	12,986	32	612	7,790	4,552	2022년	2018년	15
목포 평화광장 해양레포츠 센터 건립	7,500	580	1,194	2,862	2,864	2022년	2018년	30
목포 달리도항, 어망촌항 슬로우 아일랜드 조성사업	13,436	4,415	5,736	3,268	-	2021년	2018년	70

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
목포근대역사 문화자원활용 관광자원화	2,000	-	114	1,886	-	2021년	2019년	40
목포 반다비 체육센터 (장애인 체육센터) 건립	8,000	8,000	330	7,700	7,700	2022년	2019년	30
목포 해변맛길 30리 조성	10,000	-	2,000	4,000	4,000	2022년	2019년	40
노숙인시설 기능보강사업	2,000	800	1,200	-	-	2020년	2019년	100
목포근대문화사길 안전한 보행환경 개선사업	2,200	-	42	623	1,535	2021년	2019년	80
목포 관광특구 평화광장 관광지 활성화사업	5,000	-	2,225	2,775	-	2021년	2019년	100
장좌도 접안시설 및 계류시설 설치사업	2,000	-	625	1,375	-	2021년	2018년	30
1897 개항문화 거리 지중화 사업	4,800	600	4,200	-	-	2021년	2020년	80
미세먼지 차단숲 조성	5,000	-	1,116	1,884	2,000	2022년	2020년	22
관광거점도시 육성사업	100,000	4,300	4,300	13,000	82,700	2024년	2020년	20
전남 스마트공장 테스트베드 구축	7,980	2,490	2,490	5,490	-	2021년	2020년	80
첨단소재 융합제품 상용화 기반 강화	8,187	2,445	2,445	4,044	1,698	2022년	2020년	70
전기추진 차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발	45,070	12,350	12,350	20,680	12,040	2024년	2020년	30
목포 항구 버스킹	190	-	150	210	250	2020년	2020년	100
성산 정신요양원 기능보강사업	3,621	-	30	3,591	-	2021년	2020년	20
세계마당 페스티벌	127	-	127	104	126	2020년	2019년	100
구)목포세관 창고활용 복합문화공간 조성	3,000	-	-	3,000	-	2021년	2020년	50

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
생생문화재 사업	42.5	-	42.5	-	-	2021년	2020년	100
세라믹산단 진입도로 개설공사	4,500	-	2,000	2,500	-	2022년	2020년	32
목포문화재 야행	250	-	250	-	-	2021년	2020년	100

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

용해 2지구∼백련펌프장간 하수관거 정비

담당자

하수과 김선웅 (☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해지구 일원의 배수구역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2022년

○ 위 치 : 신동마을 ~ 백련펌프장(압해대교 아래)

○ 규 모 : 하수관로 정비 L=1,384m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,793백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,793	12,786	2,807	2,500	1,700
국 비	12,985	11,178	1,807	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,808	1,608	1,000	2,500	1,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

○ '16. 10. : 공사 착공

○ '17.  9. : 1차분 공사 준공 (하수관로 정비 L=406m 및 개거 정비 264m)

○ '18.  6. : 2차분 공사 준공 (하수관로 정비 L=140m)

○ '19.  3. : 3차분 공사 준공 (하수관로 정비 L=180m)

○ '20.  4. : 4차분 공사 준공 (하수관로 정비 L=80m)

○ '20.  5. : 5차분 공사 준공 (하수관로 정비 L=31m)

○ '21.  2. : 7차분 공사 착공 (하수관로 정비 L=90m)

○ '21.  8. : 6차분 공사 준공 (하수관로 정비 L=109m)

□ 향후계획

○ '22.  4. : 7차분 공사 준공(L=90m) - 총 1,300m 완료

○ '22. 12. : 하수관거 정비사업(하수관거 잔여분 L= 84m) 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 18,550백만원 → 변경 19,793백만원

○ 사업기간 : 당초 2014~2021 → 변경 2014~2022

사업명

대양이로하수처리분구 연계처리시설

담당자

하수과 박창현 (☎270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수처리시설에 연계 처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2021년

○ 위 치 : 목포시 대양동 국도1호선 대체우회도로 일원

○ 규 모 : 중계펌프장 2개소(대양산단, 월산마을), 압송관 5.1km, 이로중계펌프장 및 대양펌프장 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,481백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,481	9,081	1,200	200	-
국 비	4,840	4,840	-	-	-
시 도 비	483	483	-	-	-
시군구비	5,158	3,758	1,200	200	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’13.  3. : 공사착공

○ ’16.  6. : 1 ~ 4차분 공사 준공(관로매설완료) 및 이로중계펌프장 준공 및 가동,

대양펌프장 압송관로(5.1km) 완료

○ ’20. 11. : 5차분 공사 준공(대양펌프장 구조물)

○ ’21.  4. : 6차분 공사 준공(대양펌프장 기계설비)

□ 향후계획

○ ’21.  8. : 시험가동 후 시설물 인수인계(하수과→북항수질관리사무소)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 10,281백만원 → 변경 10,481백만원

○ 사업기간 : 당초 2010~2020 → 변경 2010~2021

사업명

하수도정비 중점관리지역 정비

담당자

하수과 김선웅 (☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30년 빈도 침수피해를 대비하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정되어

하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2023년

○ 위 치 : 용당 1·2동, 상동 일원

○ 규 모 : 입암천바닥정비 L=1.31km, 상동지구 방류관로, 상리대하수도 PC  암거 L=121m, 제어관리시스템 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,016백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	35,016	21,236	1,200	900	5,183
국 비	24,511	24,511	-	-	-
시 도 비
시군구비	10,505	3,222	1,200	900	5,183

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ '17.  2. ~ 4. : 1 ㆍ 2차분 공사 착공

○ '18. 11. : 1차분 공사준공

○ '20.  2. : 남해배수펌프장 유출수문 설치 완료

○ '20.  2. : 하당지구 압송관로 290m 시공 완료

○ '20.  4. : 남해배수펌프장 배수갑문 및 배수펌프 설치 완료

○ '20. 10. : 하당지구 보도블럭 교체 및 조경공사 완료

○ '21.  1. : 남해유수지 유지수로 및 관리도로 설치 추진

□ 향후계획

○ '21. 11. : 2차분 공사준공

○ '23. 12. : 하수도 중점관리지역 정비사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초 2013~2020 → 변경 2013~2023

사업명

목포 화물자동차 공영차고지 건립

담당자

교통행정과 정경만 (☎270-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서해안과 남해안 고속도로의 시‧종점, 무안국제공항, 신항만 등이 위치하여 물류거점 도시로써 원활한 역할을 수행하고, 불법주정차 민원 해결을 통한 쾌적한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1월 ~ 2021. 12월

○ 위 치 : 대양동 1183, 1186번지

○ 규 모 : 91,476.9㎡(27,671평) / 1,010대(주차장, 휴게‧정비‧관리동 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,000백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	36,000	23,825	3,175	9,000	-
국 비	16,683	16,683	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,142	7,142	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	12,175	-	3,175	9,000	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ ‘18. 11월 : 부지매입 및 등기이전 완료

○ ‘19. 11월 : 민간사업자 공모 공고

○ ‘19. 12월 : 사업계획서 접수

○ ‘20. 12월 : 실시계획인가 및 건축허가

○ ‘20. 12월 : 공사 착공

○ ‘21.  7월 : 공사 추진 중

□ 향후계획

○ ‘21. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

유달산 목재문화체험장

담당자

공원녹지과 김현수 (☎270-8344)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 목재의 중요성을 홍보하고 다양한 목재문화 체험기회를 제공할 수 있는 공간조성으로 유달산권 관광자원과 연계한 관광객 유치에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 목포시 죽교동 267-2번지외 12필지(유달산 달성주차장옆)

○ 규 모 :〔부지면적〕4,246㎡ 〔건축연면적〕856.04㎡, 지하1층/지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3.000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	3,000	150	2,500	-	-
국 비	2,400	120	2,280	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	600	30	570	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 목재문화체험장 조성사업 완료

□ 향후계획

○ ‘21. 9. : 체험장 정상운영

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과 이태양 (☎270-8585)

□ 사업목적 및 필요

○ 매립장의 사용 연한이 도래하고 있으나 신규 매립지 확보가 어려우므로 사용 중인 매립장 일부를 굴착 후 재사용함으로써 사용기간 연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2022년

○ 위 치 : 목포시 대양로 241-41 일원 (목포시 위생매립장 내)

○ 규 모 : 폐기물 굴착ㆍ선별 645,000㎥, 매립장 조성 34,778㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,964백만원                                (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	33,964	4,684	7,082	7,204	14,994
국 비	16,100	4,360	4,594	880	6,266
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,864	324	2,488	-	5,052
지 방 채	10,000	-	-	6,324	3,676

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ ’16.  3. : 지방재정투자사업 중앙심사 완료

○ ’18. 10. : 기본 및 실시설계 용역 · 도 건설기술심의 완료

○ ’19.  9. : 시설공사 계약체결 및 착공

○ '20.  5. ~ : 폐기물 굴착·선별 및 압축·포장

□ 향후계획

○ 매립폐기물 굴착·선별 및 압축·포장작업 준공 : ’22. 9.

○ 차수재 보수 및 설치(매립장 조성) : ’22. 9.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대성동행정복지센터 신축공사

담당자

회계과 김덕철 (☎270-8554)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정주여건 변화와 행정복지센터 노후화 및 공간 협소로 인해 주민 행정 복지 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. 9 ~ 2021. 3.

○ 위 치 : 목포시 대성도 27-7

○ 규 모 : 지상3층, 연면적 896.12㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500	-	500	2,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	500	2,000	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 기존 건축물 철거

○ 건설기술심의 완료

□ 향후계획

○ 대성동행정복지센터 신축공사 착공 및 준공

사업명

고하도 목화(육지면)단지 조성사업

담당자

공원녹지과 허지수 (☎270-3636)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리나라 최초 고하도에서 재배되었던 육지면의 역사를 조명하고자 조성된 국내 유일 목화테마 체험장은 어린이 및 관광객을 위한 교육적 기능과 역사, 문화가 살아있는 교육의 장을 마련하고자 추진된 사업임

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘19. 7. 29. ~ ’20. 5. 2.

○ 위 치 : 목포시 달동 1332번지

○ 규 모 : 목화상징조형물, 사계절목화온실, 목화문화관, 바다전망데크,

이야기정원, 조경 및 기반시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,700	1,358	1,342	-	-
국 비	1,350	679	671	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,350	679	671	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘20. 5. : 목화체험장 조성 완료

사업명

목포 해식애 해안길 조성사업

담당자

관광과 김승규 (☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서남해안 관문에 상징적인 해상데크 및 포토존 설치로 해상케이블카와 연계한 관광인프라 구축으로 관광수요 충족 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2021

○ 위 치 : 목포시 달동 고하도 해상

○ 규 모 : L=738m, B=2.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,900	-	2,600	1,300	-
국 비	1,950	-	1,300	650	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,950	-	1,300	650	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2020.  5. : 공사착공

○ 2020. 12. : 해상파일 설치완료

□ 향후계획

○ 2021. 5. : 상부구조물 설치완료

○ 2021. 6. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

대성동 주민센터 주변 공영주차장 조성

담당자

교통행정과 정경만 (☎270-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가톨릭 성지를 찾는 관광객들에게 쾌적한 주차환경을 제공하고, 불법 주정차로 인한 가톨릭 성지 일원의 교통혼잡 해소를 위한 공영주차장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2020. 12월

○ 위 치 : 노송길17번길 18-1 일원

○ 규 모 : 2,462㎡(744평) / 54면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	2,200	1,029	1,171	-	-
국 비	1,100	5,145	585.5	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,100	5,145	585.5	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ ‘17.  7월 : 지장재정 투자사업 자체심사 완료

○ ‘19.  4월 : 실시계획인가 고시

○ ‘19.  5월 : 보상계획 열람 공고 및 보상 추진

○ ‘19. 12월 : 실시계획 변경 고시

○ ‘20.  6월 : 지장물 철거공사 추진

○ ‘20.  8월 : 공사 착공

○ ‘20. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

용해지구 문화시설 건립사업

담당자

문화예술과 한양주 (☎270-8322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해지구가 새로 조성되어 인구가 증가함에 따라 지식정보·평생교육 등       지역민이 문화에 대한 욕구가 증가하여 이를 해결하고자 용해지구 문화시설       용지에 우리시 거점 도서관을 건립하여 문학욕구를 충족하고 주민 삶의       질을 개선하여 사회문화 발전에 이바지 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. 03. 02. ~ 2022. 04. 30.

○ 위 치 : 목포시 용해동 997-1번지

○ 규 모 : 연면적 4,424㎡ 지하1층, 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,986백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,986	32	612	7,790	4,552
국 비	6,295	-	191	3,895	2,209
시 도 비	6,691	32	421	3,895	2,343
시군구비	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기초저면 버림 콘크리트 타설

○ 지하 기초저면 밴토나이트 방수

□ 향후계획

○ 토공사 실정보고 및 설계변경

○ 지하1층 건축공사

□ 사업변경 내역

○ 철근수급 지연으로 인하여 ‘21. 07. 30. ~ 09. 30.(2개월) 사업중지 되었음으로 사업기간이 연장될 걸로 사료됨.

사업명

목포 평화광장 해양레포츠센터 건립사업

담당자

해양항만과  조기훈 (☎270-8549)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜조건을 갖춘 평화광장 수역에 해양레포츠 교육·훈련·체험 센터를 건립하여 서남권 해양레포츠 저변입구 확대 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2022년

○ 위 치 : 전남 목포시 상동 1155번지 전면수역

○ 규 모 : 레포츠센터 1동, 슬립웨이 1개소, 계류시설 20척 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,500	580	1,194	2,862	2,864
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,750	290	597	1,431	1,432
시군구비	3,750	290	597	1,431	1,432

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 타당성조사 및 기본계획수립(용역) : ‘16. 11. ~ ’17. 12.

○ 항만계획 등 행정절차 및 예산 협의(道, 해수부) : ‘16. 12. ~ ’17. 12.

○ 균특예산 신청(道) → ‘19년 2.9억 확보 : ‘18.  2.

○ ‘18년도 제2차 道 지방재정 투자심사(의결) : ‘18.  6.

○ 목포시 용역과제 사전심의(설계 580백만원) : ‘18. 10.

○ 사업 추진 방안 결정(市), 해수부, 목포해수청) : ‘19.  1.

○ 사업 추진 및 집행 계획 확정 보고(시장) : ‘19.  4.

○ 설계용역 일상감사(市) 및 계약심사(道) : ‘19.  5.

○ 건축설계공모 공고 및 선정 : ‘19.   5. 31. ~ 8. 30.

○ 기본 및 실시설계 용역 시행 : ‘19.  9. ~ ‘20. 7.14.

- 용역일시중지 : ‘20. 7. 13.

☐ 향후계획

○ 공유수면 점사용 및 비관리청 항만공사 시행허가 등(해수청) :‘21. 11.

○ 재정집행 행정절차 이행 및 건설공사 등 :‘21. 12. ~  `22. 12.

- 건설기술심의(市), 계약심사(道), 투자심사/2차(道), 공사입찰 등

사업명

목포 달리도항, 어망촌항 슬로우 아일랜드 조성사업

담당자

해양항만과 김환웅 (☎270-3772)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 고유자원과 정체성을 유지하며 섬 내 경제적, 사회 문화적 재생 및 명소화를 통해 정주 환경 및 경관 정비 개선과 함께 주민 공동체 중심의 어촌활성화를 도모함

□ 사업개요

○ 기 간 : 19. 1 ~ 21. 12

○ 위 치 : 목포시 관내 달리도, 외달도 일원

○ 규 모 : 공통사업 1식, 특화사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,432	4,415	5,736	3,269	-
국 비	9,405	3,096	4,021	2,288	-
시 도 비	1,177	367	516	294	-
시군구비	2,836	952	1,198	686	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 기본 및 시행계획수립 용역 착수 : ‘19. 4. 9.

○ 공통사업(어망촌항 선착장 정비사업) 준공 : ‘20. 9. 23.

○ 공통사업(외달도 물양장 정비사업) 준공 : ‘20. 11. 30.

○ 공통사업(달리도항 선착장 정비사업) 준공 : ‘21. 5. 14

□ 향후계획

○ 지역역량강화사업 용역 준공 : ‘21. 12.

사업명

목포근대역사문화자원 활용 관광자원화

담당자

도시문화재과 서인석 (☎270-8291)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대건축문화 자산이 여러 곳에 산재되어 있으나 활용되지 못하고 있어

○ 사회적, 경관적 가치를 지닌 근대 건축물을 활용하여 근대 건축자산 관련 콘텐츠 및 체험 공간을 조성 관광 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021. (3개년)

○ 위 치 : 목포시 항동 6-8번지 일원 (구 목포 세관창고 및 세관부지)

○ 규 모 : 대지면적 6,728. 2㎡, 연면적 991.74㎡, 창고 2동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	-	114	1,886	-
국 비	1,000	-	57	943	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,000	-	57	943	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ ‘20.  7. : 설계용역 착수

○ ‘20. 11. ~ 12. : 문화재청 현상변경 승인 및 전라남도 계약심사 완료

○ ‘20. 12. : 공사 발주 및 착공

○ ‘21.  5. : 문화재 관리위임(문화재청 → 목포시)

□ 향후계획

○ ‘21. 11. : 공사(컨텐츠 제작・설치) 완료 및 개관

□ 사업변경 내역

○ 해당 사항 없음

사업명

목포 반다비 체육센터(장애인 체육센터) 건립

담당자

교육체육과 노우균 (☎270-3677)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2023년 제104회 전국체전 이후 바로 개최되는 제42회 전국장애인체육대회       개최 및 장애인체육 인프라 구축을 위해 필요

○ 목포시 장애인 인구수 13,830명의 오랜 숙원사업인 장애인형 국민체육시설 전무함, 장애인의 생활체육 참여확대하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022년

○ 위 치 : 대양동 산 128-3번지 외 11필지(목포종합경기장 내 부지)

○ 규 모 : 지하1층 ~ 지상2층, 연면적 2,800㎡, 수중재활치료실, 다목적체육관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	-	330	7,700	-
국 비	4,000	-	165	3,850	-
시군구비	4,000	-	165	3,850	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계 진행                                : ‘20. 07 ~ 10.

○ 문체부 기본 및 실시설계 설명회                      : ‘20. 11. 06.

○ BF⦁에너지효율등급 예비인증 신청                    : ‘21. 06. 11.

□ 향후계획

○ 도 계약심사, 목포시 건설기술심의위원회 사전절차 진행      :‘21. 11. 30.(한)

○ 공사계약의뢰 및 착공                                :‘21. 12. 31.(한)

○ 공사완료                                             :‘22. 12.(한)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음(실시설계 용역 중)

사업명

목포 해변맛길 30리 조성

담당자

공원녹지과 임성기 (☎270-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포시의 아름다운 해변을 연결하여 관광객 및 시민들에게 바닷길을 제공 하고 문화, 역사, 등 주변 관광자원과 연계한 낭만과 맛이 있는 도보 관광자원을 통해 관광거점 도시 위상 제고.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022년

○ 위 치 : 목포 평화광장~삼학도~목포항~목포해양대학교

○ 규 모 : 12km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,000	-	2,000	4,000	4,000
국 비	5,000	-	1,000	2,000	2,000
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	-	1,000	2,000	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 목포 해변맛길 30리 조성(1단계) 2, 3구간 개통

□ 향후계획

○ 목포 해변맛길 30리 조성(1단계) 5구간 개통          - 2021년

○ 목포 해변맛길 30리 조성(1단계) 1, 4구간 개통        - 2022년

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

노숙인시설 기능보강사업

담당자

사회복지과 오정호 (☎270-8808)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노숙인 시설 생활인들에게 다양한 체육활동과 프로그램을 제공하여 건강하고 인간다운 삶을 살아갈 수 있도록 하고, 자립도 및 사회복귀율 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2020. 7.

○ 위 치 : 전남 무안군 삼향읍 유교길 101

○ 규 모 : 다목적강당 - 지상 2층(1층 사무실 외/2층 강당), 연면적 957.45㎡(289.63평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	800	1,200	-	-
국 비	1,000	400	600	-	-
시 도 비	500	200	300	-	-
시군구비	500	200	300	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 10. : 다목적강당 공사착공

○ 2020. 05. : 다목적강당 공사완료 후 준공검사원 제출 (○○건설⇒○○건축사)

○ 2020. 05. : 현장 점검결과 미시공분 보완요청 (○○건축사⇒○○건설)

○ 2020. 06. : 2차 준공검사원 제출 (○○건설⇒○○건축사)

○ 2020. 10. : 다목적강당 공사 정산서 제출 (○○건설⇒발주처)

○ 2020. 10. : 다목적강당 준공 승인신청서 접수 (○○건축사⇒무안군)

○ 2020. 11. : 다목적강당 사용승인 통보 (무안군)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 다목적강당 내 음향, 영상, 조명 등 설치 [낙찰차액(44,913천원) 활용 –전남도 승인]

사업명

목포근대문화사길 안전한 보행환경 개선사업

담당자

건설과 김태성 (☎270-3338)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자동차 통행 억제, 교통약자 배려, 보행위험요소 제거 등을 통해 보행자

중심의 안전하고 쾌적한 보행공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 목포시 유달동, 만호동 일원

○ 규 모 : 보행길 정비 1.8km, 안전편의시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,200	42	653	1,505	-
국 비	1,000	-	500	500	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,200	42	153	1,005	-

□ 추진상황

○ ‘19. 5. ~ ’20.  3. : 실시설계 및 주민 설명회

○ ‘20. 5. ~ ’20. 11. : 1차분 공사 착공 및 준공

○ ‘21. 4.           : 2차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 2차분(최종) 사업 완료예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포 관광특구 평화광장 관광지 활성화 사업

담당자

도시계획과 조형근 (☎270-8873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포 관광특구(‘07.9.27.)로 지정된 평화광장 기능개선으로 서남권 최대 도심속 친수공간으로 재창조하여 관광인프라 구축 및 관광객의 만족도 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. ~ 2021. 6.

○ 위 치 : 목포시 평화광장 일원

○ 규 모 : 차도와 인도, 녹지공간 재조정 L=1.2㎞, B=40m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	-	2,225	2,775	-
국 비	867	-	867	-	-
시 도 비	1,633	-	245	1,388	-
시군구비	2,500	-	1,113	1,387	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘21. 6. 25. : 목포 평화광장(관광개발, 주차장) 리모델링사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장좌도 접안시설 및 계류시설 설치

담당자

해양항만과 김환웅 (☎270-3772)

□ 사업목적 및 필요성

○ 조수간만의 차가 큰 수역에 부잔교 보급 확대를 통해 어획물 양육 및 승·하선 시 안전 이용 도모 등 어업인의 근로연건 개선 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 20. 1 ~ 21. 12

○ 위 치 : 목포시 관내 장좌도 일원

○ 규 모 : 계류시설 설치 1식, 부잔교 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	-	625	1,375	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,600	-	500	1,100	-
시군구비	400	-	125	275	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30 %)

○ 장좌도 계류시설 설치 실시설계 용역 착수 : ‘20. 4. 29.

□ 향후계획

○ 장좌도 계류시설 설치사업 착공

사업명

1897 개항문화 거리 지중화 사업

담당자

건설과 김태성 (☎270-3338)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시재생뉴딜사업과 연계한 「1897 개항문화거리 지중화사업」을 추진하여 쾌적한 가로환경 조성과 도시경관 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 목포시 유달동, 만호동 일원

○ 규 모 : 전선 및 통신선 지중화 1.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	600	4,200	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	600	2,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	2,200	-	2,200	-	-

□ 추진상황

○ `19. 7. ~ `20. 5. : 지중화사업 확정 및 협약 세부내용 협의

○ `20. 6. ~ `21. 2. : 설계 및 행정절차 이행

○ `21. 3.          : 지중화(한전․통신) 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 전선 및 통신선 지중화 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

미세먼지 차단 숲 조성

담당자

공원녹지과 임성기 (☎270-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대기오염 발생원 주변인 대양산단과 주거지역 주변 옥암수변공원에 미세먼지 차단 대규모의 숲을 조성하여 대기환경을 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022년

○ 위 치

- 대양산단(목포시 대양동 1259번지 일원)

- 옥암수변공원(목포시 옥암동 1396번지 일원

○ 규 모 : 5ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	-	1,116	1,884	2,000
국 비	2,500	-	558	942	1,000
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	-	558	942	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 대양산단 미세먼지 차단숲 조성 1.2km / 0.6ha

○ 옥암수변공원 미세먼지 차단숲 조성 0.4ha

□ 향후계획

○ 옥암수변공원 미세먼지 차단숲 조성(2단계) 2ha   - 2021년

○ 대양산단 미세먼지 차단숲 조성(2단계) 2ha       - 2022년

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

관광거점도시 육성사업

담당자

관광거점도시추진단

김광명 (☎270-8567)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방한 관광객의 지방방문 확산을 견인하는 ‘지방 대표도시 육성’

○ 외국인 관광객이 가고 싶은 ‘모델도시 육성’

○ 지역의 창의적 역량을 강화하고 지속가능한 ‘지역주도형’ 관광 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년

○ 위 치 : 5개 권역(원도심, 삼학도+남항, 갓바위, 평화광장, 고하도), 목포시

포함 서남권 9개 시·군

○ 규 모 : 1,000억원(국비 500, 도비 200, 시비 300)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	100,000	4,300	4,300	13,000	82,700
국 비	50,000	2,150	2,150	6,500	41,350
시 도 비	20,000	860	860	2,600	16,540
시군구비	30,000	1,290	1,290	3,900	24,810

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020년 선도사업 추진 완료

○ 2021년 관광거점도시 육성사업 추진 중

□ 향후계획

○ 연도별 사업추진계획에 따라 체계적인 사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

전남 스마트공장 테스트베드 구축사업

담당자

지역경제과 정재원 (☎270-4049)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세라믹 산업현장과 유사한 환경의 실공장형 테스트베드 구축으로 관내 수요기업 소재특화 체감형 모델 구축 및 제조 경쟁력 강화

○ 기업체감형 세라믹 시험생산라인 스마트 실증화 기반 조성 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2021년(2년)

○ 위 치 : 목포 세라믹산단 내

○ 규 모 : 공장 내 스마트 인프라(HW, SW) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,980	2,490	2,490	5,490	-
국 비	4,780	1,490	1,490	3,290	-
시 도 비	960	300	300	660	-
시군구비	2,240	700	700	1,540	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 공급기업 선정 및 시스템 구축, 설비의 스마트 업그레이드

○ 데이터 기반 현장 통합운영시스템 구축(제조관리, 설비 유틸리티 관리)

□ 향후계획

○ 스마트 제조관리 시스템, 실시간 자동 데이터 수집‧분석체계 구축

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

첨단소재 융합제품 상용화기반 강화사업

담당자

지역경제과 정재원 (☎270-4049)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역혁신인프라 연계 상용화 지원 플랫폼 구축‧운영을 통한 고부가가치 첨단소재 융합제품 상용화 촉진

- 플랫폼 구축 운영, 장비고도화, 기술사업화 지원 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 위 치 : 목포 세라믹산단 내

○ 규 모 : 신규장비 6종 구축 및 기존장비(28종) 성능 개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,187백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,187	2,445	2,445	4,044	1,698
국 비	5,675	1,832	1,832	2,906	937
시 도 비	548	177	177	242	129
시군구비	1,278	414	414	564	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	686	22	22	332	332
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 기업선정(13개사) 및 융합제품 예비테스트 제작 추진

○ 제조단위 공정별 장비 구축(5종 신종, 9종 개선), 전문인력 강화 교육

□ 향후계획

○ 전주기 기업지원을 통한 전남지역 소재기업 융합제품 상용화 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

전기추진 차도선 및 이동식 전원공급시스템 개발

담당자

지역경제과 정재원 (☎270-4049)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제해사기구(IMO)의 규제에 적극 대응하기 위한 친환경 산업생태계 조성 필요 → 신기술 개발 및 실증체계 마련

- 이동 교체식 전원시스템 기술개발 및 표준화, 전기추진

차도선 개발 및 실증, 이동 교체식 전원공급 시스템 운영기술 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5년)

○ 위 치 : 목포 남항 일원

○ 규 모 : 전기추진 차도선 1척 건조, 전원공급 인프라 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	45,070	12,350	12,350	20,680	12,040
국 비	26,800	7,220	7,220	12,730	6,850
시 도 비	3,600	1,080	1,080	1,440	1,080
시군구비	5,400	1,620	1,620	2,160	1,620
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	9,270	2,430	2,430	4,350	2,490
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 전기추진 차도선 기본설계 및 생산설계 완료 → `21말 선박 건조

○ 남항 재개발부지 인프라 구축(건축/토목) 진행 중

□ 향후계획

○ 연구 및 시험 인프라 구축 및 시운전, 실증 테스트

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포 항구 버스킹

담당자

문화예술과 오애의 (☎270-8991)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 새로운 문화콘텐츠로 자리매김한 목포항구버스킹을 운영하여 외지관광객을 흡인하고 이를 통해 지역경제 및 관광 활성화에 기여하고자 함

○ 지역 예술인들에게 끼를 발산할 수 있는 공연 무대 제공으로 거리공연 활성화와 문화예술 인재 발굴·육성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 5. ~ 2020. 11 / 7개월간

○ 위 치 : 목포항구포차, 근대역사1관 광장, 노을공원

○ 규 모 : 60회 188팀, 관람객 30,000명

○ 내 용 : 보컬, 통기타, 밴드 등 오프라인 공연 등 57회, 온라인 공연 3회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	730	70	150	210	300
국 비	150	-	-	-	150
시 도 비	60	-	-	-	60
시군구비	520	70	150	210	90

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2020. 3.  : 2020 목포항구버스킹 참가자 공개모집 및 선정

○ 2020. 5.  : 목포항구버스킹 추진

○ 2020. 11. : 결과보고 및 설문조사를 통한 피드백, 2021 사업반영

□ 향후계획

○ 2021. 3.  : 참가자 공개모집 선정

○ 2021. 7.  : 목포항구버스킹 추진

○ 2021. 10. : 전국버스킹경연대회

○ 2021. 11. : 결과보고 및 설문조사 등 모니터링

사업명

성산정신요양원 기능보강사업

담당자

노인장애인과 윤현숙 (☎270-8707)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 및 폐쇄된 시설물의 개축공사를 통해 정신요양시설 설치 기준의 적정성을 확보하고, 시설 거주 정신장애인들의 거주환경 개선 및 서비스 질 향상을 기하고 시설물의 안전성을 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 9월 ∼ 2021년 12월(1년 4개월)

○ 위 치 : 전남 무안군 유교길 101

○ 규 모 : 개축 2,165.97㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,621백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,621	-	30	3,591	-
국 비	1,810	-	15	1,795	-
시 도 비	905	-	7	898	-
시군구비	906	-	8	898	-
자부담 (합계 미포함)	181	-	139	42	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 레미콘타설 완료

□ 향후계획

○ 사업 일정에 맞추어 연내 완공을 목표로 추진

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

세계마당페스티벌

담당자

문화예술과 최소은 (☎270-8511)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남 유일 공연예술축제로 국내외 예술작품을 초청해 마당의 세계화 전략 추구 및 지역화합 등 공동체 가치를 지향하며 예술과 관광을 융합해 지역 발전을 꾀하는 예술축제임.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. 4. ~ 9. 8. / 5일간

○ 위 치 : 목포시 유달예술타운 공연장 및 원도심 일원

○ 규 모 : 참여예술팀 42팀 191명, 관람객 19,280명

○ 내 용 : 마당놀이, 마임, 거리공연 등 56회 공연 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 157백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	686	219	157	144	166
국 비	75	75	-	-	-
시 도 비	200	-	85	52	63
시군구비	261	104	42	52	63
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	150	40	30	40	40
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2020. 4.  : 2020년 지역대표공연예술제 공모사업 선정(전남도)

○ 2020. 9.  : 세계마당페스티벌 개최

○ 2020. 11. : 결과보고 및 정산 제출

□ 향후계획

○ 2021 목포시 중기지방재정계획 반영

○ 2021. 5  :  2021 지역대표공연예술제 공모사업 선정(전남도)

○ 2021. 9  : 세계마당페스티벌 개최

○ 2021. 11. : 결과보고 및 정산제출

사업명

구)목포세관창고 활용 복합문화공간 조성

담당자

관광과 임성훈 (☎270-3512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최신 관광 트렌드에 맞춰 구)목포세관창고에 맛의 도시 목포의 식문화

체험 공간을 설치하여 관광객에게 특색 있는 문화·관광 서비스 제공

○ 맛의 도시 목포의 위상을 높일 수 있는 콘텐츠를 관광거점공간인 구)목포세관창고에

조성하여 시민과 관광객 모두가 만족할 수 있는 관광문화복합체를 조성코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2022. 2.(1년 8개월)

○ 위 치 : 목포시 해안로177번길 10(항동 6-8, 6-33번지)

○ 규 모 : 4,879.6㎡[창고 A동(660.16㎡), 창고 B동(330.58㎡), 외부(3,887.86㎡)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	-	-	3,000	-
국 비	1,600	-	-	1,600	-
시 도 비	400	-	-	400	-
시군구비	1,000	-	-	1,000	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

❍ 구)목포세관 복합문화공간 조성 사업 계획 수립  : 2020.  7.

❍ 용역 입찰공고 및 계약                         : 2020.  9. ~ 11.

❍ 용역 착수                                     : 2020. 11. 17.

❍ 착수보고회 개최                               : 2021.  1.

❍ 중간보고회 개최                               : 2021.  4.

❍ 기본설계 보고회 개최                          : 2021.  6.

❍ 실시설계 및 내역검토                          : 2021.  8.

□ 향후계획

○ 공사 착공                                     : 2021. 10.~

○ 개관식                                       : 2022.  3.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간

- 당초기간 : 2020. 6. ~ 2021. 10.

- 변경기간 : 2020. 6. ~ 2022.  2.

※변경사유 : KDI 예산 적정성 검토로 인한 착공 시일 지연

사업명

생생문화재 사업

담당자

도시문화재과 이연주 (☎270-8321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대역사문화공간을 활용해 그 시대에 직접 들어가 참여하는 이색적인 테마 공간 체험프로그램을 상설 운영하여 지역경제 및 관광활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 11.

○ 위 치 : 목포근대역사문화공간 일원

○ 내 용 : 2개 프로그램 5회 개최

[목포 근대역사 여행] 거대 인형 옥단이를 이용한 시민참여형 거리극

[목포 개항장 시간여행] 근대의 거리 재현을 통한 놀이, 체험, 공연

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  42.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	42.5	-	42.5	-	-
국 비	17	-	17	-	-
시 도 비	5.1	-	5.1	-	-
시군구비	20.4	-	20.4	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020년 생생문화재 사업 완료

- 목포 근대역사 여행 : 4회 운영, 1,265명 참여 및 관람

- 목포 개항장 시간여행 : 3회 운영, 875명 참여 및 관람

- 문화재를 활용한 체험형 문화재 관광상품 모델 제시

□ 향후계획

○ 2021 생생문화재 사업 추진 : 2021. 4. ~ 11.

사업명

세라믹산단 진입도로 개설공사

담당자

도시계획과 조형근 (☎270-8873)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산정농공단지와 세라믹산단을 연결하는 도로개설을 통한 원활한 물류 수송 및 산단 경제 활성화를 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 연산동 630-11번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=244m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,500	-	2,000	2,500	-
국 비	1,000	-	1,000	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,500	-	1,000	2,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

○ ‘20. 12.  : 1차분 공사착공

○ ‘21.  8.  : 2차분 공사착공

□ 향후계획

○ ‘20. 12.  : 1차분 공사준공

○ ‘21. 08.  : 2차분 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포 문화재 야행

담당자

도시문화재과 이연주 (☎270-8321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대문화재가 밀집된 공간에서 목포만의 특색을 살린 야간문화 향유프로그램을 기획·운영하여 도시브랜드 육성 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10. 23. ~ 10. 24./ 10. 30. ~ 10. 31.<4일>

○ 위 치 : 목포근대역사문화공간 일원

○ 규 모 : 문화재 활용 야간 공연, 체험, 전시 프로그램 운영 2회(총 4일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  250 백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	250	-	250	-	-
국 비	100	-	100	-	-
시 도 비	30	-	30	-	-
시군구비	120	-	120	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020년 목포 문화재 야행 행사 개최 완료

- 야경 조성 및 전시 위주의 온·오프라인 병행 형태로 추진

- 5개 분야 21개 야간문화재 활용 프로그램 운영

- 2020년 문화재청 추진 우수야행 후보(6개 지역)에 선정

- 온라인 야행(SNS·유튜브) 콘텐츠 관람 및 조회건수 : 20,000여건

□ 향후계획

○ 2021 목포 문화재 야행 행사 개최 : 2021. 10. 8. ~ 10. 10.(3일)

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경                                         (단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재	비 고
사업비	360	250	코로나19로 인한 행사 축소 (온라인 중심)

10-2. 지방채 발행사업

우리 목포시에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
목포권 광역 위생매립장 순환이용 정비사업	33,964	10,000	16,100	-	7,864	-	10,000	42

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과 이태양 (☎270-8585)

□ 사업목적 및 필요

○ 매립장의 사용 연한이 도래하고 있으나 신규 매립지 확보가 어려우므로 사용 중인 매립장 일부를 굴착 후 재사용함으로써 사용기간 연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2022년

○ 위 치 : 목포시 대양로 241-41 일원 (목포시 위생매립장 내)

○ 규 모 : 폐기물 굴착ㆍ선별 645,000㎥, 매립장 조성 34,778㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,964백만원                                (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	33,964	4,684	7,082	7,204	14,994
국 비	16,100	4,360	4,594	880	6,266
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,864	324	2,488	-	5,052
지 방 채	10,000	-	-	6,324	3,676

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ ’16.  3. : 지방재정투자사업 중앙심사 완료

○ ’18. 10. : 기본 및 실시설계 용역 · 도 건설기술심의 완료

○ ’19.  9. : 시설공사 계약체결 및 착공

○ '20.  5. ~ : 폐기물 굴착·선별 및 압축·포장

□ 향후계획

○ 매립폐기물 굴착·선별 및 압축·포장작업 준공 : ’22. 9.

○ 차수재 보수 및 설치(매립장 조성) : ’22. 9.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 목포시에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총 사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTL	2005년 하수관거 BTL 사업	푸른목포 환경(주)	100,992	51,687	4,788	4,763	39,754	2010.4.~ 2030.4
BTL	2006년 하수관거 BTL 사업	맑은목포 환경(주)	138,419	56,686	6,704	6,716	68,313	2012.1.~2032.1.
BTL	2009년 하수관거 BTL 사업	청정목포 환경(주)	68,047	21,303	3,318	3,328	40,098	2013.10.~2033.10.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

2005년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수과 신동원 (☎270-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해·북항처리구역을 민간투자방식(BTL) 사업으로 하수관거 정비를 통하여 하수기능 극대화와 하수처리 효율 제고 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006. 6. ~ 2010. 4.

○ 위    치 : 용당동, 연동, 산정동, 목원동, 동명동, 삼학동 일원

○ 총사업비 :　502.9억 원

○ 사업규모 : 관거정비 L=63.3km, 배수설비 3,204개소, 내항펌프장 1동

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	100,992	51,687	4,788	4,763	39,754
국 비	60,896	32,987	3,028	3,006	21,875
시 도 비	35,325	18,700	1,760	1,757	13,108
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중 (운영기간 : 2010. 4. ~ 2030. 4.)

□ 향후계획

○ 매 분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ ‘09. 12. 9. : 준공지표(I/I → QA/QC) 및 운영평가지표 변경에 따른 사업비 및 운영비 조정

사업명

2006년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수과 신동원 (☎270-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해·북항처리구역을 민간투자방식(BTL) 사업으로 하수관거 정비를 통하여 하수기능 극대화와 하수처리 효율 제고 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 8. ~2012. 1.

○ 위    치 : 용당1·2동, 용해동, 연동, 산정동, 삼학동, 상동, 북항동 일원

○ 민간사업자 : 맑은목포환경(주)

○ 총사업비 :　659.35억 원

○ 사업규모 : 관거정비 L=49.8km, 배수설비 705개소, 용당우수저류조 1개소

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	138,419	56,686	6,704	6,716	68,313
국 비	87,253	36,166	4,237	4,237	42,613
시 도 비	51,166	20,520	2,467	2,479	25,700
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중 (운영기간 : 2012. 1. ~ 2032. 1.)

□ 향후계획

○ 매 분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2009년 하수관거 BTL 사업

담당자

하수과 신동원 (☎270-8664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해·북항처리구역을 민간투자방식(BTL) 사업으로 하수관거 정비를 통하여 하수기능 극대화와 하수처리 효율 제고 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011. 2. ~ 2013. 10.

○ 위    치 : 북항동, 연산동, 원산동, 산정동 일원

○ 민간사업자 : 청정목포환경(주)

○ 총사업비 :　324.5억 원

○ 사업규모 : 관거정비 L=19.3km, 배수설비 1,039개소, 우수박스 678m

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	68,047	21,303	3,318	3,328	40,098
국 비	40,488	12,988	1,994	1,994	23,511
시 도 비	27,560	8,315	1,324	1,334	16,587
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중 (운영기간 : 2013. 10. ~ 2033. 10.)

□ 향후계획

○ 매 분기 성과평가에 따라 임대료, 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음