109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 목포시에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	총사업비	집 행 액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재 까지 진척률 (%)
		기 투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
용해2지구∼백련펌프장간 하수관거 정비	18,550	7,153	3,562	1,571	6,264	2020	2011	51%
남악신도시 하수처리장 증설	29,656	19,249	5,249	5,158	-	2019	2013	97%
서남권 수산종합지원단지 조성	32,062	15,423	6,597	10,042	-	2020	2014	35%
도시재생 선도지역사업	20,180	16,174	2,356	1,650	-	2019	2017	94%
상동초기우수처리시설 설치사업	15,609	13,101	2,508	-	-	2019	2014	100%
대양이로하수처리분구 연계처리시설	9,681	7,269	-	1,800	612	2020	2010	75%
하수도정비 중점관리지역 정비	35,016	24,733	-	3,000	7,283	2020	2014	87%
목포 화물자동차 공영차고지 건립	36,000	19,992	3,833	8,510	3,665	2020	2015	66%
목포 야구장 조성	4,785	4,600	185	-	-	2018	2015	100%
행정타운부설주차장 조성	5,866	3,314	2,494	-	-	2018	2015	100%
서산,온금 지구 재정비 촉진지구기반시설조성	316,077	9,182	280	500	306,115	2020	2015	25%
유달산 목재문화체험장 조성	3,000	-	-	3,000	-	2020	2015	15%
목포권광역위생매립장	40,820	651	354	11,472	28,343	2021	2016	15%
목포항구축제	1917	-	602	615	700	매년	2018	50%
고하도 주차장 조성	2,900	1,280	990	630	-	2019	2016	98%
목포시 하당 청소년 문화의 집	2,464	47	2,370	-	-	2018	-	100%
목포해안힐링랜드 조성사업	3,500	100	1,000	2,400	0	2019	2016	45%
행남사~삼진물산 간 도로개설	4,200	-	1,500	2,700	-	2020	2016	40%
동명동 송도마을 취약지역 개선사업	4,301	181	960	1,900	1,260	2020	2017	30%
가톨릭성지 주변 도로개설	5,600	264	1,157	2,504	1,675	2020	2017	40%

사 업 명	총사업비	집 행 액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재 까지 진척률 (%)
		기 투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
유달산주차장 조성	5,400	1,940	2,400	1,060	-	2019	2017	98%
고하도목화(육지면)단지조성사업	64	-	2,300	29	12	2022	2017	20%
대성동주민센터 주변 공영주차장 조성	2,200	-	29	2,198	-	2020	2017	5%
목포 이순신 수군문화축제 개최	180		180	200	200	2022	2017	100%
목포 문화재 야행사업	360	-	360	-	-	-	2018	100%
목포국제축구센터 인조구장 잔디교체	3,400		1,400	1,300	700	2020	2018	41%
목포 평화광장 해양레포츠센터 건립	7,500	-	-	580	6,920	2022	2018	10%
유달산 남도명품 관광지 조성	2,700		832	1,868		2019	2018	68%
목포종합경기장 건립	92,000		400	20,000	71,600	2022	2018	10%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘18년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

용해 2지구∼백련펌프장간 하수관거 정비

담당자

하수과 김형중(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해지구 일원의 배수구역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2020년

○ 위 치 : 신동마을 ~ 백련펌프장(압해대교 아래)

○ 규 모 : 하수관로 신설 L=1,384m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	18,550	7,153	3,562	1,571	6,264
국 비	12,985	6,593	3,062	1,023	2,307
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,565	560	500	548	3,957

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 51%)

○ '16. 10. : 공사 착공

○ '17.  9. : 1차분 공사 준공(L=406m)

○ '18.  6. : 2차분 공사 준공(L=140m)

○ '19.  3. : 3차분 공사 준공(L=180m)

○ '19.  5. : 4차분 공사 착공(L=80m)

□ 향후계획

○ '19. 12. : 4차분(하수관거 L= 80m) 공사 준공 예정

○ '20. 12. : 잔여분(하수관거 L= 314m) 공사 추진

사업명

남악신도시 하수처리장 증설사업

담당자

하수과 이정훈(☎270-8627)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속 증가에 따라 배출되는 하수량도

증가하고 있어 장래 하수처리시설 증설 추진

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013년 ~ 2019년

○ 위 치 : 목포시 옥암동 1376번지(남악신도시 하수처리장 내)

○ 규 모 : 시설용량 10,000㎥/일 증설(기존 12,000㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,656백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년
계	29,656	19,249	5,249	5,158
국 비	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-
시군구비	12,969	4,311	3,500	5,158
기 타	16,687	14,938	1,749	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

❍ '13.  4. 15. : 하수종말처리장(2단계) 증설 분담 협약

❍ '13.  5. ~ ‘15.  3. : 기본 및 실시설계

❍ '15. 12.  9. : 총괄분 및 1차분 착공

❍ ‘16. 10.  3. : 1차분 완료(PHC 말뚝 및 지하터파기)

❍ ‘17.  6. 26. : 2차분 완료(가시설, 지하터파기 및 구조물공사)

❍ ‘18.  5. 31. : 3차분 완료(구조물 공사, 건축공사 및 방류관로 매설)

❍ ‘19.  4. 30. : 4차분 완료(기계설치 및 배관공사)

❍ '19.  7월 현재 : 5차분 추진중(도로 포장 및 시운전)(진도 85%)

□ 향후계획

❍ '19.  7. : 5차분 토목, 전기 공사 완료

❍ '19. 10. : 시운전 및 사업완료

사업명

서남권 수산종합 지원단지 조성사업

담당자

수산진흥과

강복주(☎270-3671)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북항 배후부지 내에 수산물 생산‧유통‧물류 기능을 집적화 시켜 원스톱으로 어업활동을 종합적으로 지원할 수 있는 기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014-2020

○ 위 치 : 목포시 죽교동 674-2외 2필지

○ 규 모 : 부지 101,951㎡, 연면적 14,265㎡

○ 사업내용 : 위판장, 가공시설, 냉동․냉장, 제빙․저빙, 판매장, 보급창고, 유류공급시설(유류탱크 3기, 급유소 2개소, 고속주유기 4기) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,062백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	32,062	15,423	6,597	10,042	-
국 비	14,984	7,712	3,299	5,021	-
시 도 비	796	300	0	496	-
시군구비	5,789	2,784	1,319	1,512	-
민간자본	10,493	4,627	1979	3,013	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ (서남권수산종합지원단지) 시설공사

○ (유류공급시설) 친환경 수산종합지원단지 조성사업 편입 추진

□ 향후계획

○ 유류공급시설사업 완료 : ‘19. 12월

○ 서남권 수산종합지원단지 조성사업 준공 및 가동 : ‘20. 상반기

사업명

도시재생 선도지역 사업

담당자

도시재생과

행정7급 조광운(☎270-8744)

시설9급 정일화(☎270-3643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사·문화·관광자원을 활용한 관광활성화로 목포의 원도심 목원동 활력증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년 ※ 2019년 현재 잔여사업 추진 중(계속비 이월)

○ 위 치 : 목원동 일원 (면적 60만㎡)

○ 규 모 : 10개 마중물사업 (26개 세부사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	20,180	16,174	2,356	1,650	-
국 비	10,090	9,988	97	5	-
시 도 비	10,090	6,186	2,259	1,645	-
시군구비	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 94.2%)

○ ‘14. 04. : 도시재생 선도지역 전국 13곳 지정(목포시 지정)

○ ‘14. 12. : 도시재생활성화계획 국토부(특별위원회) 승인

○ ‘15. 03. : 지방도시재생위원회 재심의(원안 가결)

○ ‘17. 03. : 도시재생활성화계획 국토부 관문(변경) 심사 승인

- 내용 : 유사사업 통합 및 분할에 따른 사업내용 및 사업비 조정

⇒ 사업 집행액 및 잔액 : 19,005백만원 / 1,174백만원 - ‘19. 6월말 기준

□ 향후계획

○ ‘17. 7. ~ 12 : 잔여사업 추진 및 마무리

- 목포오미특화장터사업, 안전하고 정감있는 마을조성 사업 등 6개 사업

○ ‘20. 1. ~ 3. : 목포시 도시재생 선도지역 사업 정산(국토부)

사업명

상동초기우수처리시설 설치사업

담당자

하수과 김형중(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오염부하량이 높은 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스  터미널 앞 저지대 상습침수 문제의 근원적 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2019년

○ 위 치 : 목포시 상동 버스터미널 앞

○ 규 모 : 저류조 V=10,000㎥(L=55m, B=40m, H=5.5m), 기계실, 전기실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,609백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,609	13,101	2,508	-	-
국 비	10,926	10,926		-	-
시군구비	4,683	2,175	2,508	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘13.  4. : 기본 및 실시설계용역 완료 및 공사착공

○ ‘16.  1. : 1단계 사업 준공(저류조 설치완료)

○ ‘16.  3. : 2단계 사업 착공(우수암거, 차집시설, 전기실 등)

○ ‘17.  8. : 3차분 사업 착공(기계실 건축)

○ ‘17.  9. : 2차분 사업 준공

○ ‘18.  2. : 3차분 사업 준공 및 4차분 착공

○ '18.  12. : 토목 ․ 건축 ․ 조경공사 총괄분 준공

○ '19.  4. : 전기공사 준공

○ '19.  7. : 준공완료

사업명

대양이로하수처리분구 연계처리시설

담당자

하수과 김형중(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수처리시설에 연계

처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2020년

○ 위 치 : 목포시 대양동 국도1호선 대체우회도로 일원

○ 규 모 : 중계펌프장 2개소(대양산단, 월산마을), 압송관 5.1km, 이로중계펌프장 및 대양펌프장 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,681백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,681	7,269		1,800	612
국 비	4,840	4,840	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,841	2,429	-	1,800	612

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○  ‘13.  3.  : 총괄 및 1차분 공사(압송관로 0.8km) 착공

○  ‘15.  5.  : 이로펌프장 구조물 및 압송관로 5.1㎞완료

○  ‘15.  8.  : 4차분(이로펌프장 기계시설 및 부대공)착공

○  ‘16.  4.  : 4차분(이로펌프장 기계시설 및 부대공)준공

○  ‘16. 10.  : 이로중계펌프장 시운전

□ 향후계획

○ ‘19.  7. ~ ‘20. 12. : 5차분 공사 추진

○ ‘20.  1. ~  6. : 대양펌프장 잔여분 및 시운전 후 준공

사업명

하수도정비 중점관리지역 정비

담당자

하수과 김형중(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30년 빈도 침수피해를 대비하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정되어

하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2020년

○ 위 치 : 용당 1·2동, 상동 일원

○ 규 모 : 입암천바닥정비 L=1.31km, 상동지구 방류관로, 상리대하수도 PC          암거 L=121m, 제어관리시스템 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	35,016	24,733	-	3,000	7,283
국 비	24,511	24,511	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,505	222	-	3,000	7,283

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

○ ‘14.  5. : 하수도정비 중점관리지역 기본계획 승인(환경부)

○ ‘17.  2. : 공사착공(총괄분 및 1차분)

○ ‘17.  3. : 전기공사 공사착공

○ ‘17.  4. : 2차분 공사착공

○ '17.  6. : 공공하수도 설치 인가

○ '18. 11. : 중점관리지역 1차분 공사준공

○ ‘19.  4. : 2차분 공사 일시 중지

□ 향후계획

○ '19.  7. ~ 8. : 추가사업 발주 및 우수처리시설 인수인계 등 운영

○ '19.  9. : 상동지구 방류 관로 공사 추진(L= 290m)

사업명

목포 화물자동차 공용차고지 건립

담당자

교통행정과 김기복

(☎061-270-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서해안과 남해안 고속도로의 시․종점, 무안국제공항, 신항만 등이 위치하여 물류거점 도시로써 원활한 역할을  수행하고, 불법주정차 민원 해결을 통한 쾌적한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년

○ 위 치 : 목포시 대양동 1183번지 외 1필지

○ 규 모 : 91,510㎡(27,682평), 600대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	36,000	19,992	3,833	8,510	3,665
국 비	25,200	14,000	2,683	5,957	2,560
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,800	5,992	1,150	2,553	1,105

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ ‘18. 11. : 부지매입 및 등기 완료

○ ‘18. 12. : 화물차고지 사업 관련 타 시군 사례조사

□ 향후계획

○ ‘19.  3. : 사업방식 변경 관련 관계기관 협의(국토부, 전남도)

○ ‘19.  8. : 화물자동차 공영차고지 운영방안(민자유치) 결정

○ ‘19.  9. : 민간사업자 공모

○ ‘19. 11. : 우선협상대상자 선정 및 협약체결

○ ‘20.  1. ~ 12. : 사업 추진

사업명

목포 야구장 조성

담당자

교육체육과

박시은 (☎270-3562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대양산단 진입로 개설로 접근성이 향상된 국제축구센터 인근에 목포야구장을 조성하여 야구동호인의 생활야구 저변확대와 시민 건강 증진 도모하며,  야구 인프라 시설을 구축하여 서남권 중심도시 위상제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2018

○ 위 치 : 목포시 대양동 958번지 부근(국제축구센터 옆))

○ 규 모 : 조성면적 24,629㎡, 야구장 12,900㎡(99m×122m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,785백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,785	4,600	185	-	-
국 비	400	400	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,385	4,200	185	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  5월 : 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시

○ 2016.  8월 : 도시계획시설(야구장)사업 실시계획인가고시

○ 2016. 11월 : 편입부지 감정평가 및 토지보상

○ 2016. 12월 : 공사착공

○ 2018.  3월 : 공사준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	야구장12,600㎡(98×121)	야구장12,900㎡(99×122)
총사업비	3,900백만원	4,785백만원
사업기간	16.3~16.9	16.12.~18.3

사업명

행정타운부설주차장 조성

담당자

도시문화재과

조성록(☎270-8333)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차공간이 열악한 남교동 원도심 중심상가 인근에 공용주차장 건립

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013 ~ 2018

○ 위 치 : 목포시 남교동 88-16번지(행정타운 인근)

○ 규 모 :

- 대지면적 : 1,312.7㎡

- 건 축 물 : 연면적 2888.391㎡, (지상3층), 철골조 자주식 주차장100면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,866백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,866	3,372	2,494	-	-
국 비	1,657	1,657	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,209	1,715	2,494	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘17. 9 : 공사착공(시공사 : 대도종합건설)

○ ‘18. 5. : 준공 및 관리이관(목포시 교통행정과)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

서산,온금 지구 재정비 촉진지구 기반시설조성

담당자

도시문화재과

김세휘(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 및 불량주택이 밀집된 서산ㆍ온금지구를 유달산의 풍광과 다도해의 전망이 어우러진 친환경 주거공간으로 재개발하여 원도심 정주인구 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2020년

○ 위 치 : 온금동 일원

○ 규 모 : 202,067㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 316,077백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	316,077	9,182	280	500	306,115
국 비	19,738	6,000	-	-	13,738
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	19,739	3,182	280	500	15,777
민간자본	276,600	-	-	-	276,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘12. 11. : 서산 ․ 온금 재정비촉진계획 결정 고시

○ ‘15. 02. : 지방재정 중앙투자심사 조건부 의결(394억)

○ ‘16. 1. ~ ’17. 10. : 재정비촉진계획 (변경) 도 도시계획심의 및 변경 고시 완료

○ ‘19. 07. : 재정비촉진지구 변경(안) 제출(조합장 → 목포시)

□ 향후계획

○ ‘19. 7 ~ : 온금근린공원 보상 추진

○ ‘19. 8 ~ : 재정비촉진지구 변경 관련 주민공람 등 행정절차 추진

사업명

유달산 목재문화체험장 조성

담당자

공원녹지과 김현수(☎270-8344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림문화체험 소외지역인 목포권에 목재문화체험장을 조성하여 목재에 대한 지식과 정보제공 및 다양한 목재문화 체험기회 제공 등 서남부권 산림문화체험의 중심지로 자리매김하여 산림 자원을 접목한 관광자원화 및 산림생활문화 네크워크 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1 ~ 2020. 12

○ 위 치 : 목포시 죽교동 267-2번지외 8필지 (유달산 달성주차장옆)

○ 규 모 :〔부지면적〕2,784㎡  〔건축연면적〕993.32㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000	-	150	2,850	-
국 비	2,400	-	120	2,280	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	600	-	30	570	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

❍ ‘18. 09. : 용역과제 사전심의

❍ ‘18. 11. : 일상감사 및 계약심사

❍ ‘19. 01. : 실시설계용역 사업수행능력평가(PQ) 제출안내 공고

❍ ‘19. 03. : 실시설계 용역 착수

❍ ‘19. 05. : 착수보고회 개최

❍ ‘19. 07. : 건물배치도(안) 검토보고

□ 향후계획

○ ‘19. 07 ~ 19. 09 : 용역완료 및 행정절차 이행

○ ‘19. 10 : 공사발주

사업명

위생매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과

신성원(☎270-8585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매립장의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립지 확보가 어려우므로

사용중인 매립장 일부를 굴착 후 재사용함으로써 사용기간 연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년

○ 위 치 : 목포시 대양로 241-41일원(목포시 위생매립장 내)

○ 규 모 : 굴착 600,000㎥, 선별 750,000㎥, 조성 50,690㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	40,820	651	354	11,472	28,343
국 비	19,146	500	334	4,886	13,426
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	21,674	151	20	6,586	14,917

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2016. 03. 02. : 지방재정투자사업 중앙심사 완료(조건부 승인)

○ 2018. 10. 17. : 기본 및 실시설계 용역·도 건설기술심의 완료

○ 2019. 03. 29. : 조달청 공사원가사전검토 및 계약의뢰(검토중)

□ 향후계획

○ ‘19. 08. ~ ’21. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명

2018 목포항구축제

담당자

관광과 안민우(☎270-8441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국을 대표하는 항구축제로서 바다위 어시장인 ‘파시’와 ‘낭만’이라는 차별화된 프로그램을 통해 지역경제 활성화 및 관광객 유치 도모

□ 사업개요(매년)

○ 기 간 : ‘18. 10. 5.(금) ~ 10. 7.(일) / 3일간

○ 위 치 : 목포항 및 삼학도 일원

○ 규 모 : 615백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,917백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,917	-	602	615	700
국 비	160	-	80	-	80
시 도 비	30			30	-
시군구비	1,727	-	522	585	620

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 축제추진계획 및 추진시기 축제추진위 심의 :  ‘18. 2.

○ 축제 대행사 선정 입찰공고 및 계약 체결   :  ‘18. 5. ~ 7.

○ 축제 세부추진계획 수립 및 행사 준비      :  ‘18. 8. ~ 10.

□ 향후계획

○ 축제 대행사 선정 입찰공고 및 계약체결  : ‘19. 5. ~ 7.

○ 유관기관․선주협회․상인회 등 참여 협의 및 홍보 : ‘19. 7. ~ 10.

○ 축제 세부추진계획 및 행사 준비 : ‘19. 9. ~ 10.

사업명

고하도 주차장 조성

담당자

관광과 나창영(☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포 해상케이블카 및 고하도를 방문하는 지역주민과 관광객을 위한 기반시설(주차장) 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019

○ 위 치 : 목포 달동 844번지

○ 규 모 : 주차장 조성(A17,429㎡), 주차대수 395대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,900	1,280	990	630	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,600	500	600	500	-
민간자본	1,300	780	390	130	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  98%)

○ 2016. 3. : 투자심사 완료

○ 2017. 9. : 실시계획 인가 고시

○ 2017. 9. ~ : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019.  7. : 공사완료보고서 제출(도시계획과)

○ 2019.  8. : 공사완료 공고

사업명

목포시하당청소년문화의집

담당자

여성가족과

오남균(☎270-8137)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하당지역 청소년들 위해 다양한 문화․예술프로그램 운영을 통한

건전한 청소년여가활동 공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2018

○ 위 치 : 목포시 통일대로 119번길 25

○ 규 모 : 연면적 1,260㎡(지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,417	47	2,370	-	-
국 비	1,934	38	1,896	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	483	9	474	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 12. 준공

사업명

목포 해안힐링랜드 조성사업

담당자

관광과 나창영(☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ “목포 해상케이블카” 및 “고하도 목화체험전시장”과 연계하여 해안과 도심경관 조망이 동시에 가능한 관광시설 설치를 통한 관광인프라 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2019

○ 위 치 : 목포 고하도 해안 일원

○ 규 모 : 해안 데크로드 설치 (L=1km, B=1.8m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,500	100	1,000	2,400	-
국 비	2,450	70	700	1,680	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,050	30	300	720	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  45%)

○ 2016. 11. : 투자심사 완료

○ 2018.  1. : 공유수면 점사용 및 실시계획 승인

○ 2018.  1. : 공사 착공

○ 2018.  4. : 공사 일시정지(안전진단 실시)

○ 2018.  5. ~ 7. : 구조안전진단 실시

○ 2018. 10. : 건설사업관리(감리) 용역 계약 체결

○ 2019.  3. : 공사 일시정지 해제

○ 2019.  3. ~ : 공사 재착공

□ 향후계획

○ 2019.  8. : 공사 준공

사업명

행남사 ∼삼진물산 간 도로개설

담당자

도시계획과 오상현(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산정농공단지와 세라믹산단 간 연결도로 개설을 통한 산단활성화 및

고하대로 교통정체해소와 주민안전확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~2020. 12.(4년)

○ 위 치 : 목포시 연산동 742-8번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=510m, B=15m

- 1구간[L=216m,15억(보상8,공사7)], 2구간[L=294m,27억(보상13,공사14)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,200	-	1,500	2,700	-
국 비	700	-	-	700	-
시 도 비	500	-	-	500	-
시군구비	3,000	-	1,500	1,500	-

□ 추진상황(진도 : 40%)

○ ‘17. 5. 4. : 시설결정변경(L=528m, B=20m → L=510m, B=15m)

○ '17. 7. 27./ '18. 1.~5. :  실시계획 인가고시/ 1구간 보상협의

○ '18. 7.~9./ '18. 9.~12. :  지토위 재결완료/ 1구간 공사완료

□ 향후계획

○ ‘19. 1. ~ 8./  : 2구간 보상협의 및 행정절차(보완설계, 기술심의, 전남도 계약심사)

○ ‘19. 9. ~ : 2구간 공사착공

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초 L=528m, B=20m → 변경 L=510m, B=15m,

○ 총사업비 : 당초 4,200백만원( 시비 4,200 )  →

변경 4,200백만원( 특별교부세 700, 도비 500, 시비 3,000 )

○ 사업기간 : 변경없음

사업명

동명동 송도마을취약지역 개선사업

담당자

도시재생과

강찬승  (☎270-3649)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시취약 지역의 열악한 기초생활인프라 정비, 주거환경 개선 및 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 동명동 162번지 일원(동명동 송도마을)

○ 규 모 : A=14547㎡(5개 분야, 22개 세부사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,301백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,301	181	960	1,900	1,260
국 비	3,287	176	678	1,444	958
시 도 비	304	-	68	133	88
시군구비	710	5	214	323	214

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ ‘16. 02. : 공모사업 선정

○ ‘16. 05. : 총괄코디네이터 위촉

○ ‘17. 06. : 주민협의체 구성 및 마스터플랜(안) 수립

○ ‘17. 07. ~ 10. : 국토교통부 마스터플랜(안) 검토위원회 심의

○ ‘17. 11. : 마스터플랜(안) 승인 (국토부 -> 목포시)

○ ‘18. 05. : 경로당 리모델링 공사 완료

○ ‘18. 12. : 진입도로(위험옹벽)공사 및 마을안길 공사등을 위한 공폐가 철거

○ ‘19. 05. : 도시계획시설(마을안길 및 커뮤니티센터) 결정 및 지형도면 고시

□ 향후계획

○ ‘19. 09. ~ 20. 03. : 집수리 지원 및 공폐가 정비 완료

○ ‘19. 09. ~ 20. 09. : 소프트웨어 사업(주민소득사업, 마을학교 등) 완료

○ ‘19. 10. ~ 20. 07. : 마을안길 도로공사, 상하수도 정비 및 도시가스 설치

사업명

가톨릭성지 주변 도로개설

담당자

건설과 김선웅(☎270-3484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로로 주간선도로와 연계된 교통망 확보 및 주거 밀집지역 재난재해 방지를 위한 소방도로 개설

○ 가톨릭성지 주변 접근성 향상으로 방문객 및 주민 편의를 도모하여 정주 인구 유입 증가와 함께 지역상권 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2020

○ 위 치 : 산정동 74-190번지 일원(중로3-74호선, 소로2-623호선)

○ 규 모 : 도로개설 L=520m, B=8~12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,600	264	1,157	2,504	1,675
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,100	253	175	997	1,675
기 타	2,500	11	982	1,507	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018.  1. : 1구간(중로3-74호선 L=86m, B=12m) 도로개설공사 완료

○ 2018.  9. : 2구간(중로3-74호선 L=74m, B=12m) 도로개설공사 완료

○ 2019.  6. : 3구간(소로2-623호선 L=180m, B=8m) 철거공사 착공

□ 향후계획

○ 2020.  1. : 4구간(중로3-74호선 L=180m, B=12m) 도로개설공사 추진

○ 2020.  5. : 3구간(소로2-623호선 L=180m, B=8m) 도로개설공사 완료

○ 2020. 12. : 4구간(중로3-74호선 L=180m, B=12m) 도로개설공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 4,900백만원 → 변경 5,600백만원

사업명

유달산 주차장 조성

담당자

관광과 나창영(☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포 해상케이블카 및 유달산을 방문하는 지역주민과 관광객을 위한 기반시설(주차장) 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019

○ 위 치 : 목포 죽교동 519-9일원

○ 규 모 : 주차장 조성(A24,892㎡), 주차대수 453대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,400	1,940	2,400	1,060	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	931	1,152	509	-
민간자본	2,800	1,009	1,248	551	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  98%)

○ 2017. 8. : 투자심사 완료(전라남도)

○ 2017. 9. : 실시계획 인가 고시

○ 2017. 9. ~ : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019.  7. : 공사완료보고서 제출(도시계획과)

○ 2019.  8. : 공사완료 공고

사업명

고하도 목화(육지면)단지 조성사업

담당자

공원녹지과 이종희(☎270-3636)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 고하도 목화(육지면) 최초 재배지에 목화체험전시관을 조성해 지역      향토산업으로 육성하여 목포 해상케이블카, 국립호남권생물자원관, 고하도      역사유적공원 조성사업, 고하도 해양힐링랜드 조성 및 고하도 용오름길      인공갯벌사업 등과 연계한 관광상품으로 개발

◦ 지역민의 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여하고 시대적 상황에

맞는 친환경 힐링사업으로 부가가치가 높음.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2018 ~ 2020

○ 위 치 : 고하도 일원

○ 규 모 : 목화단지 조성 35,019㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,400	-	2,300	2,900	1,200
국 비	1,500	-	600	900	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,900	-	1,700	2,000	1,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 목화체험장 조성사업 착공

□ 향후계획

○ ‘20. 2월 목화체험장 조성 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 목화체험장 조성지 변경 : 당초)충무분교(달동 800-8) ⇒ 현재)목화정원 내(달동 1332일원)

○ ‘17~’18 LM-목화발견으로 목화 재배면적 확대에 어려움이 있어 현) 목화정원 내 목화 식재 (고하도 내 토지보상 면적 축소)

사업명

대성동 주민센터 주변 공영주차장 조성

담당자

교통행정과 김기복

(☎270-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가톨릭 성지를 찾는 관광객들에게 쾌적한 주차환경을 제공하고, 불법 주정차로 인한 가톨릭성지 일원의 교통혼잡 등 고질적인 민원을 해결하기 위한 공영주차장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 목포시 노송길17번길 18-1 일원

○ 규 모 : 2,462㎡(744평), 56면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,200	-	29	1,171	-
국 비	1,100	-	-	1,100	-
시 도 비	-	-	-		-
시군구비	1,100	-	29	1,071	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘18.  9. : 실시설계용역 완료

○ ‘18. 12. : 실시계획 인가 신청

□ 향후계획

○ ‘19.  4. : 실시계획 인가 고시

○ ‘19.  5. : 보상계획 열람 공고

○ ‘19.  6. : 편입 토지 등 감정평가 의뢰

○ ‘19.  7. : 보상 추진

○ ‘19.  9. ~ 12. : 사업 추진

사업명

목포 이순신 수군문화축제

담당자

관광과 이재형(☎270-8442)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이순신 수군문화축제를 통해 이충무공의 정신을 기리고, 목포를 거점으로 한 수군의 변천사와 민초들의 삶을 콘텐츠화하여 문화·관광자원을 확보하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. 7. ~ 4. 8.

○ 위 치 : 유달산 노적봉 일원

○ 규 모 : 수군퍼레이드, 수군정찰대, 노적쌓기, 강강술래 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	180		180	200	200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	180		180	200	200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018 목포 이순신 수군문화축제 추진완료 : 2018. 4. 8.

□ 향후계획

○ 축제추진위원회의 개최

○ 2019 목포 이순신 수군문화축제 사업계획 수립

○ 2019 목포 이순신 수군문화축제 개최

사업명

목포 문화재 야행

담당자

도시문화재과

유세훈(☎270-8321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대문화재가 밀집된 공간에서 목포만의 특색을 살린 야간문화 향유프로그램을 기획·운영하여 도시브랜드 육성 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. 7.~9. 8.  / 2018. 10. 26.~10. 27.

○ 위 치 : 목포근대역사문화공간 일원

○ 규 모 : 문화재 활용 프로그램 2회(총 4일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	360	-	360	-	-
국 비	180	-	180	-	-
시 도 비	90	-	90	-	-
시군구비	90	-	90	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018 목포문화재 야행 1회차 행사 실시 : 2018. 9. 7.~9. 8.

○ 2018 목포문화재 야행 2회차 행사 실시 : 2018. 10. 26.~10. 27.

□ 향후계획

○ 2020 문화재야행 사업 공모 신청 : 2019. 7. 31.

○ 2019 목포문화재 야행 사업 실시 : 2019. 9. 20.~9. 22.

사업명

목포국제축구센터 인조구장 잔디교체

담당자

교육체육과

박시은 (☎270-3562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2009년 8월에 조성한 인조구장 잔디의 내구연한(7년)이 초과되어 이용객들의 부상이 속출하고, 정상적인 훈련 등에 많은 지장을 주고 있어 시급히  보수하여 안전한 체육활동 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2020

○ 위 치 : 목포국제축구센터 (내화마을길89)

○ 규 모 : 인조구장 5개면 교체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,400	-	-	-	-
국 비	1,020	-	420	390	210
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,380	-	980	910	490

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018년 인조구장 2개면 교체 완료

○ 2019년 인조구장 2개면 목포국제축구센터와 협의 추진 중

□ 향후계획

○ 인조구장 2개면(하키구장 1면, 인조구장 1면) 축구센터와 협의 완료 후 8월 말 집행예정

사업명

목포 평화광장 해양레포츠센터 건립

담당자

해양항만과 이석태(☎270-8549)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜조건을 갖춘 목포 평화광장 수역을 해양레저공간으로 조성하여 서남권 해양레포츠 저변인구 확대 및 지역경제 활성화 견인에 이바지하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019년 ～ 2022년

○ 위 치 : 목포시 상동 1155번지(평화광장) 전면수역

○ 규 모 : 공유수면점사용 12,747㎡, 레포츠센터 1동, 도교 1개, 계류시설 20척 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,500	-	-	580	6,920
국 비	3,750	-	-	290	3,460
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,750	-	-	290	3,460

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 중기지방재정계획 반영(’18~‘21)                 : ‘16. 9.

○ 센터건립 타당성조사 및 기본계획 수립          : ‘16. 11. ~ ’17. 12.

○ 전라남도 지방재정투융자심사                   : ‘18. 6.

○ 목포시 용역과제 사전심의                      : ‘18. 10.

○ 균특보조 신규사업 확정(‘19년 설계 580백만원)   : ‘18. 12.

○ 사업 추진 방안 결정(市, 해수부, 목포해수청)     : ’19. 1.

○ 사업 추진 및 집행 계획 확정                   : ‘19. 4.

○ 설계용역 일상감사(市) 및 계약심사(道)          : ‘19. 5.

○ 건축설계공모 공고                            : ‘19. 5. 31. ~ 8. 19.

□ 향후계획

○ 건축설계공모 심사 및 선정                     : ‘19.  8.  30.

○ 기본 및 실시설계 용역 시행(10개월)                 : ‘19.  8. ~ ‘20. 5.

○ 비관리청 항만공사 시행허가 등(해수청)           : ‘20.  6. ~   8.

○ 건설공사 및 재정집행 행정절차 이행             : ‘20.  9. ~  12.

- 건설기술심의(市), 계약심사(道), 투자심사/2차(道), 공사입찰 등

○ 건설공사(비관리청 항만공사) 시행                  : ‘21. ~ ‘22.

사업명

유달산 남도명품 관광지 조성

담당자

공원녹지과

임성기(☎270-8374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역을 대표하는 관광명소로 “목포해상케이블카” 개통을 앞두고 명품관광지 조성을 통한 방문객 눈높이 충족과 서남권 관광밸트사업의 구심점 역할을 하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2019

○ 위 치 : 목포시 죽교동 유달산공원 일원

○ 규 모 : 1,486,584㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,700	-	832	1,868	-
국 비	1,350	-	417	933	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,350	-	415	935	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 76.7%)

○ 유달산공원 탐방로 조성 및 이정표 설치

- 일등바위 탐방로 조성 0.6km, 숲길 안내 이정표

○ 유달산공원 공원시설 현대화

- 수도 급수시설 신설, 주차장 포장 및 도색, 화장실 등 공원시설 보강 등

□ 향후계획

○ 공원 내 화장실 신축 등 편익시설 설치 및 보강

사업명

목포종합경기장 건립

담당자

교육체육과 박치현

(☎270-8323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2022년 제103회 전국체육대회 개최를 위하여 지역의 대표적인 종합경기장을 신축하고 향후에 전국규모의 체육행사를 지속적으로 개최하며, 전남 서남권의 체육인프라 불균형을 해소 및 전지훈련팀 유치, 복합형 체육시설 활용을 통한 지역경제 활성화와 시민의 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2022

○ 위 치 : 목포시 대양동 산124번지 일원(목포FC 인근)

○ 규 모 : 종합경기장, 보조경기장 및 부대시설 등 체육단지 조성

- 종합경기장 : 지상3층, 연면적16,000㎡, 관람석 16,380석

- 보조경기장 : 면적 13,658㎡(건물 없음), 주차장 813대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 92,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	92,000	-	400	20,000	71,600
국 비	20,000	-	-	-	20,000
시 도 비	23,000	-	-	5,000	18,000
시군구비	49,000	-	400	15,000	33,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 목포종합경기장 건립

- 입찰공고  : 2019. 4. 23.

- 입찰결과(참여업체 2개사) : 2019. 5. 23.

· 남양건설, 동광건설, 새천년종합건설, 삼호산업개발, 공간건축사)

· 금호산업, 계룡건설, 남해종합개발, 용진, 디에이건축사

- 현장설명 및 기본설계 실시(추진중)      : 2019. 5. ~ 8.

○ 보상 추진

- 편입부지 보상 93억원(토지 69필지, 분묘 51기 등) : ‘19. 7. 2기준

□ 향후계획

○ 목포종합경기장 건립

- 적격업체 선정(조달청 + 道건설기술심의)  : 2019. 9.

- 인가고시 및 우선시행분(토목공사) 추진   : 2019. 10. ~ 2020. 6.

- 본공사(건축공사) 착공 및 준공           : 2020.  7. ~ 2022. 5.

○ 보상 추진

- 토지수용위원회 재결 : ‘19. 10. ~ 12.

10-2. 지방채 발행사업

우리 목포시에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
해 당 없 음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2018년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

※ 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 목포시에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후
해 당 없 음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

※ 해당없음